문서번호	시설보수과-555
결재일자	2014.1.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	01/24 이규상
협 조

대책회의(3차) 결과보고

(2013년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

대책회의(3차) 결과보고

(2013년 개봉고가차도 보수공사)

「2013년 개봉고가차도 보수공사」 도급사인 예도건설(주)의 계약변경(준공기한 연기) 지연으로 지체상금 누적증가 문제 및 동절기 이후 공사재개를 위한 대책회의 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

□ 일 시 : 2014. 1. 24(금) 14:30

□ 장 소 : 강서도로사업소 2층 소장실

□ 참 석 자

○ 발주처(강서도로사업소) : 소장, 시설보수과장, 담당자

○ 감독기관(시설관리공단) : 박영환 감독

○ 원도급사(예도건설(주)) : 김철권 대표

○ 하도급사((주)삼우아이엠씨) : 김달진 부사장, 김만호 이사

Ⅱ		주요의견

□ 원도급사 : 예도건설(주)

○ 법정관리 개시 이후 회생계획 인가여부 결정을 위한 조사보고서 재검토 및 작성중(법원 조사위원)

○ 2월초에는 조사보고서가 부장판사에게 제출되면 인가여부의 방향이 결정될 것으로 보임

○ 계약변경(준공기한 연기)는 계약이행보증기관인 우리은행에서 계약이행보증서 재발급에 부정적이나, 조사보고서 결과가 좋게 나오면 재발급 가능할 것임

□ 하도급사 : ㈜삼우아이엠씨

○ 동절기 이후 기온여건에 따라 2월 말에도 재포장공사가 시행할 수 있도록 공사재개 준비에 만전을 기하고 있음

□ 감독기관 : 시설관리공단

○ 철도구간 시공을 위하여 한국철도공사와 시공협의(작업시작 45일전까지 협의서류 제출) 중으로 공사재개 준비에 철저를 기하겠음

□ 발주처 : 강서도로사업소

○ 도급사는 계약기간 만료에 따른 지체상금 부과액이 누적 증가되고 있으므로 계약변경(준공기한 연기) 지연이 길어질 경우, 손해를 볼 수 있음을 인지하시고,

○ 2월중 법정관리(회생절차) 진행상황, 계약변경(준공기한 연기) 또는 타절준공 등 향후대책을 재논의할 수 있는 일자를 2월초까지 알려주시기 바람

○ 동절기 이후 재포장공사가 재개될 수 있도록 공사 일정, 인력·장비 투입계획 등 사전준비 철저요망(감독, 하도급사)

Ⅲ		향후 조치계획

◦ ‘13. 2. : 대책회의(4차) 예정

※ 2014.1.24. 대책회의(4차) 현황사진

끝.