서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	마곡지구내 재생수 공급시기 조정에 따른 협조(조치) 요청

1. 물순환정책과-2099(2016.2.4.)호와 관련입니다.

2. 마곡지구내 재생수 공급시기 조정 계획에 따라 재생수 공급시기가 2016. 6월에서 2017. 4월로 조정되었음을 알려 드리며, 각 부서(기관)에서는 일정에 차질이 없도록 아래 사항에 대하여 적극 협조(조치)하여 주시기 바랍니다.

가. 공급시기 : 2017. 4월

나. 시 운 전 : 2016. 12월 ~

다. 협조사항

- 도기본(방재시설부) : 시운전 및 준공 연기, 관로부설 등에 따른 제반 조치

- 물재생시설과(서남환경) : 공원 관로부설 협조, 시설 인수인계

- 강서구청 : 서남환경공원 관로부설 협조

붙임 : 재생수 공급시기 조정 계획 방침문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생시설과장,서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),강서구청장(공원녹지과장)
주무관	조명환		물재이용관리팀장	신승화		물순환정책과장	02/05 代윤정기
협조자
시행	물순환정책과-2177	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동), 서울시청 서소문청사 8층	/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-7799	/	mhsky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)