문서번호	방재시설부-1852
결재일자	2016.2.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공원시설과장	방재시설부장
임성은		김인숙	02/05 임춘근
협조
	주무관		박계현

「경의선숲길 공원조성공사」

2차구간 안내판 추가설치에 대한 검토

2016. 02

도시기반시설본부

방재시설부

「경의선숲길 공원조성공사」

2차구간 안내판 추가설치에 대한 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 2차구간 안내판 추가설치 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2016 – 41(2015.02.04)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 A=84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.5

○ 공 사 비 : 14,908백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 경의선숲길 공원조성공사 2단계 2차구간 보완설계시 변경(누락)된 안내판 시설물에       대하여 공원이용의 쾌적성 및 편의성 제공을 위한 추가설치 검토

○ 안내판 추가설치 내용 및 수량 검토

- 2차구간 안내판(종합,시설) 최초계약에 대한 보완설계 변경 수량

구 분	단위	종합안내판		시설안내판		비 고
		최초계약	보완설계	최초계약	보완설계
와우교	EA	1	0	0	1
신수동	EA	2	0	1	0
새창고개	EA	1	1	0	1
원효로	EA	2	0	1	1
계		6	1	2	3

*

- 추가설치 안내판 검토

1) 목적 : 이용의 쾌적성 및 편의성 향상, 정보 제공

2) 추가안내판 수량 변경 검토

① 종합안내판 : 새창고개 잔여구간 1개소 외 누락된 2차 구간별 시ㆍ종점부

또는 교차로 적정 위치 추가설치

② 시설안내판 : 시설물 변경(새창고개 레인가든 삭제, 원효로 유실수원→ 헌 소소화물차 안내판 변경, 신수동 물길안내판 추가)에 따른 수량, 위치  변경설치 반영

*

구 분	단위	종합안내판		시설안내판		비 고 (시설안내판)
		당초	변경	당초	변경
와우교	EA	0	1	1	1	옛신촌선분기점
신수동	EA	0	2	0	1	신수동물길안내
새창고개	EA	1	1	1	0	레인가든 삭제
원효로	EA	0	2	1	1	유실수원→ 헌 소화물차 안내판
계		1	6	3	3

*

③ 위치별 설치 계획(당초/변경)

<  범례 :  >

∎와우교구간

당초
변경

∎신수동구간

당초
변경

∎새창고개 잔여구간

당초
변경

∎원효로 잔여구간

당초
변경

3) 소요금액 검토

• 수량 증ㆍ감 현황

공 종	규 격	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
종합안내판	600×H1800mm	1	6	증) 5
시설안내판	1700×900mm	3	3	-

• 관급자재비 증ㆍ감 현황                                        (단위 : 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
종합안내판	600×H1800mm	1,828	10,969	증) 9,141	기계약단가 1,828,264
시설안내판	1700×900mm	2,882	2,882	-	기계약단가 960,900
계		4,710	13,851	증) 9,141

**

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ “경의선숲길 공원조성공사” 2단계 2차구간(와우교, 신수동, 새창고개 잔여, 원효로)에 대하여

공원이용의 쾌적성 및 편의성 확보를 위하여 보완설계시 누락된 종합안내판

추가설치와 시설안내판의 변경을 검토한 바,

○ 공원관리시 필요하다고 사료되며 1단계, 2단계 1차 구간과 연속성을 유지하여 설치하는 것이 적정하다고 판단됨

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과 안내판 추가설치에 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하고 차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.