문서번호	도시철도사업부-1327
결재일자	2016.2.11.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

						시 민
주무관		경전철1과장		도시철도사업부장
임병길		박동룡		02/11 권영찬
협 조
	건축공사과장				김내환
	공사지원과장				김창기
	경전철2과장				최광무

-우이~신설 민간투자사업 -

공정회의 결과보고

2016. 2.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 우이~신설 민간투자사업  -

공정회의 결과보고(2회)

우이-신설 도시철도 토목 및 건축공사가 공정계획 기간 내 적기 완료토록 사업시행자와 격주단위 ‘공정회의’ 개최결과 보고임

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘16. 2.2.(수) 10:30~11:50

○ 장    소 : 도시철도국 회의실(10층)

○ 참 석 자 : 33명

- 본  부 : 도철사업부장, 도철건축부장, 토목, 건축분야 담당과장 및 주무관

- 사업자 : 법인대표, 건설사업단장, 토건공사팀장, 각 공구 책임감리원 및
현장소장(건축분야 소장 및 건축감리원 포함)

□ 회의결과

○ 공정율 (′16.2.1 현재)

- 토목분야 : 계획 / 실적,  94.7% / 93.5% (대비 98.8%)

- 건축분야  : 계획 / 실적,  75.8% / 45.0% (대비 59.3%)

※ 건축공사는 현재 설비공사가 중점 추진되고 있고 정거장 법랑판넬 등 마감공사는 4월～8월에 이루어지므로 공정율이 저조

	<주 요 내 용>
○ 1,2공구 부대공사 (출입구, 환기구, 도로포장)는 게획공정 준수하여 정상 추진중에 있음(′16년 8월말 부대공사 완료) - 1공구는 차량기지옆 하천(인수천)공사를 우기전에 완료하여 경비실 축조 및 종합 관리동 포장 등 마무리 작업에 차질 없도록 사전 조치
○ 3공구 L09정거장 2번 출입구(임금님 짜장면)는 주변상가의 영업피해 보상 민원으로 공정추진이 다소 부진하나′16.9월말 목표공정 확행 ○ 4공구 L11정거장 5번 출입구(환승통로)는 계획공정상′16.7월초에 착공하여 주․야간 돌관공사 등 실시하여′16.9월말 까지 완료

○ 각 공구별 부대공사 추진현황

□ 공정보고 사항

【우이 1공구】- 현공정 : 토목 95.8%, 건축 76.1%

〇 현장소장(이선우)

- 차량기지와 L01～L03 정거장 출입구, 환기구, 포장 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 3월말 : 외부출입구(#1,#2) 구조물 공사

․′16년 4월 ～ 6월말 : 에스컬레이터(E/S) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 8월말 : 출입구 캐노피 설치 및 기층포장 완료

※ 표층포장 및 차선도색은 준공직전 마무리 예정(′16년 9～10월)

〇 책임감리원 (홍명기)

- 차량기지 하천공사(인수천)는 우기전 완료 및 경비실 축조 준비

- L01～L03 도로복구를 위해 H-Pile 제거 및 되메우기 작업 추진

- 시스템(송변전, 전차선, AFC,신호) 및 시운전 등 후속공종에 차질이 없이 추진

【우이 2공구】 - 현공정 : 토목 95.9%, 건축 44.2%

〇 현장소장(신현승)

- L04～L07 정거장 출입구, 환기구, 도로복구 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년.1월 ～ 4월말    : 외부출입구(#1,#2) 구조물 공사

․′16년.4월 ～ 7월 중순 : 에스컬레이터(E/S)  제작 및 설치

․′16년.5월 ～ 8월말    : 출입구 캐노피 설치 및 포장복구 완료

※ 환기구 돌출부 높이 확정 필요(공공시설 환기구 설치 및 관리기준 –2015.9,서울시 안전총괄본부) : 보도위 지상 0.5m까지 구조물+1.0m 이상 투시형 구조,

우이신설 설계 적용 : 보도위 지상 0.3m까지 구조물+1.2m이상 투시형 구조)

〇 책임감리원 (박기만)

- 부대공정이 가장 늦은 L07 정거장(#1) 에스컬레이터(E/S)는 4월초에 제작의뢰하여 7월 중순 설치하고, 캐노피 제작 및 설치는 8월말까지 완료

- L05 정거장 E/S 및 E/V 설치시 장애인 편의시설 규정을 준수하여 휠체어 이동 동선에 불편이 없도록 기술검토 후 설치

【우이 3공구】 - 현공정 : 토목 90.1%, 건축 19.2%

○ 현장소장 (이광연)

- L08～L10 정거장 출입구, 환기구 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 7월말 : 외부출입구 구조물 공사

․′16년 4월 ～ 8월말 : 에스컬레이터(E/S) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 9월말 : 출입구 캐노피 설치 및 포장복구 완료

- 최지구간 (L09정거장 2번 출입구) 부대공사 착수

․ L09 정거장 주변 임차인(임금님 짜장면)이 영업피해 보상 요구하며 작업장 내 자동차 적치 등 공사방해 함에 따라 공사방해죄로 성북경찰서(형사과)에  고발조치하며 더 이상 공정지연 없도록 조치(줄파기 공사 후 지장물 확인완료)

○ 책임감리원 (박득균)

- L08정거장 외부 출입구(#1,#2) 굴착 및 흙막이 공사 정상 추진

- L09 정거장 외부출입구(#2)무봉리 순대국앞 복공판 설치 및 임금님 짜장면 앞    줄파기 공사완료 후 파일천공(11본) 작업 실시

- L10정거장 외부 출입구(#2) 지하2층 경사구간 철근조립 작업 추진

【우이 4공구】- 현공정 : 토목 91.8%, 건축 19.5%

○ 현장소장(임철순)

- L11～L13 정거장 부대공사(출입구, 환기구, 도로포장 등) 정상 진행중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 7월 중순 : 외부출입구 구조물 공사

․′16년 6월 ～ 9월 중순 : 엘리베이터(E/V) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 9월말    : 옥외시설물 및 건축마감

○ 책임감리원(김대연)

- L11정거장 연결통로(출입구#5)는 유관부서(서울메트로) 업무협의 진행 중이며, ‘16. 7월초 실착공 가능하나, 주․야간 등 돌관작업으로 목표공기 준수

- L12정거장 연결통로(출입구#5,#6)는 도시철도공사와 협의 중이며, 3월초 착수

- L13정거장 외부출입구(E/V)를 ‘16. 2월말 지장물(한전) 이설 및 구조물공사 착수하여 6월말 완료

□ 사업시행자

〈건설사업단장〉

○ 우선 시운전 구간(차량기지～L04)의 건축한계 (이격거리 150～200mm)에 신호설비 및 송수관로가 저촉되어 보완 또는 재시공 중에 있음

○ 우선 시운전 구간 수전(16.1.25일)에 따른 근로자 안전성 확보을 위해 전기공급 구간에 대한 안내문 사전 배포

○ 정거장 내부 협소한 공간에서 건축, 설비, 시스템 등 동시 작업시 발생하는 폐자재(쓰레기) 외부반출이 원할히 이루어지도록 사전 조치

□ 본부 당부사항

〈토목분야〉

○ 정거장 출입구, 환기구,도로포장은′16.9월까지 완료

- 포장완료일을 준공예정일에 맞춰 16.11월까지 늦춘 공사장은 당초 계획과 같이 재조정

○ 1공구 차량기지 인수천 공사는 우기전 마무리 및 조속 입주가능토록 즉시 시행(후속 포장 지연으로 입주 지연되므로 선 포장 방안 검토)

○ L09정거장 2번 출입구는 가장 늦은 구간이며, 9월 까지 완료하기 위해서는 건축공사 일정이 부족(1개월로 계획수립)하므로 현재 토목공사 일정을 재검토하고 단축 방안 강구하고 다음 회의시 답변 요청

○ 터널 및 정거장 내부 협소한 공간에서 건축, 설비, 시스템 등 동시 작업시 안전사고 발생하지 않도록 안전수칙 준수

〈건축분야〉

○ 미술장식품은 사업시행자가 작가와 사전협의하여 계약체결, 제작 및 설치 일정에 차질 없도록 사전조치

○ 구조물 완료전 도면에 따른 E/S 제작시 관계자(토목, 건축, 설비, 전기 등) 합동 검토하고 토목구조물은 정밀 공사 시행

○ 설비분야도 건축공사의 공정간섭 요인이 있으므로 설비부도 공정회의 참여 요청

○ 건축공정율이 계획보다 저조할 경우 서면으로 지연사유 및 만회대책 작성

붙 임   1) 공정회의 자료(1~4공구) 1부.

2) 계획대비 실적공정율 1부

3) 공정회의 참석자 명단 1부.  끝.