문서번호	치수과-381
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	치수과장
김동식		권혁제	02/11 신용철
협 조

한강 준설(저수로, 취수장) 정비공사

건설사업관리 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

한강 준설(저수로, 취수장) 정비공사

건설사업관리 검토 보고

□ 사업개요

○ 위    치 : 강동구 하일동~강서구 개화동 시계

○ 공사규모 : 준설 120,400㎥(저수로, 취수장)

○ 사 업 비 : 3,924백만원

○ 공사기간 : 2016. 3 ~ 2016. 12

□ 관련규정 및 절차

○ 건설기술진흥법 시행령 제55조 3호 : 감독권한대행 등 건설사업관리 시행

○ 국토교통부 고시 제2014-296호(2014.05.23.): 건설사업관리 적정성 검토기준

【사업관리방식 적정성 검토절차】

	사업특성 평가	평가	소요인력 산출		가용인력산출 및 역량평가	사업특성	①사업관리방식 결정		②소요인력/가용인력 비교	조정	사업관리 방식확정
		⇨		⇨		⇨		⇨		⇨
						평가점수				절차

□ 건설사업관리방식 결정

○ 기 준 – 사업특성 및 발주청 역량 평가기준에 의거

평 가 점 수	50점 미만	50점이상 ~65점 미만	65점 이상 ~80점 이하	80점 초과	비고
관리방식	직접감독	건설사업 관리 (시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리 미적용)	건설사업 관리 (시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리 적용가능)	건설사업 관리 (시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리 적용)

◎「감독 권한대행 등 건설사업관리」: 시공단계에서 품질 및 안전관리 실태의 확인, 설계변경,

준공검사 등 발주청의 감독권한을 대행하는 업무

○ 사업특성 평가 및 발주청 역량 결과 : 건설사업관리 적용가능(66점)

공사비	공사기간	구분	공사특성 (30점)		사업여건(25점)				공사 수행 방식 (15점)	발주청역량 (30점)		합계
			공 종 난이도	공 사 난이도	규모	기간	민원발생	유사경험		인력수	경력
39 억원	10 개월	내용	보통	기타	100억 미만	1년 미만	통상 수준	5건 미만	기타 공사	70%미만	12년 미만	66점
		점수	10	5	4	1	3	3	10	20	10

□ 소요인력 및 예산

○ 소요인력/가용인력 비교·조정 기준

구 분	가용인력 ≧ 소요인력	가용인력 < 소요인력
관리방식	직접감독	건설사업 관리 (시공단계에서 감독 권한대행 등 건설사업관리)

○ 총 소요인력 비교 조정결과 :  건설사업관리 적용

- 직접감독(총 소요인력×1.0) : 13.35인·월

- 시공단계에서 감독 권한대행 : 9.62인·월

- 가용인력 산정 : 4.40인·월(발주청 담당1인)

※ 가용/소요인력 비교 검토

관 리 방 식	발주부서 가용인력	발주부서 소요인력	과부족	비 고
직접감독	4.40인·월	13.35인·월	-8.95인·월
건설사업관리 (시공단계에서 감독 권한대행)	4.40인·월	9.62인·월	-5.22인·월	적용

○ 소요예산 : 225백만원

□ 검토결과

○ 건설사업관리 방식 검토결과 소요인력 대비 가용인력 부족에 따라 감독권한 대행 건설사업관리 기술자 현장투입

- 지천합류부 및 취수장 주변 준설 공사에 투입하여 시공 적정성 및 계측 관리 중점지도 필요

- 한강 수상작업 특수성을 감안, 작업의 여건상 상시 감독 필요.

붙 임 : 1. 사업특성 및 발주청 역량 평가 결과 1부

2, 건설사업관리 기술자 투입현황.   끝.