문서번호	방재시설부-1916
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장
손병도	김인숙	전결 02/11 代이도헌

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간)』

건설사업관리기술자 배치변경 검토보고

2016. 2.

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간)』

건설사업관리기술자 배치변경 검토보고

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간, 전면책임)  계약사로부터 공정계획에 따른 상주 건설사업관리기술자의 탄력적인 운영을 위하여 건설사업관리기술자의 배치변경 요청이 있어 검토 보고드림 (관련근거 : 선진경춘감-16-051(2016.2.4.)호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)(전면책임)

○ 과업위치 : 경춘선 폐선부지 공원조성 2,3단계 구간, 경춘철교정비

- 2단계 : 경춘철교~산업대3길 고가철교(L=1.1㎞)

- 3단계 : 육사삼거리~서울시계, 광운대역 주변(L=3.0㎞)

- 경춘철교 정비 L=176.5m

○ 내    용 : 공원조성(조경/토목/건축/전기/통신/폐기물처리용역 등) 건설사업관리

○ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.6.10.(1차분 2016.7.31.)

○ 용 역 비 : 1,188,900천원(1차분 763,924천원)

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성엔지니어링, ㈜진전기엔지니어링

□ 배치변경

○ 변경내용 : 향후 공정계획을 감안하여 배치계획 변경

- 배치변경 현황(1차분)

분 야	당 초	변 경	증 감	비 고
투입개월	55.73	55.73	-	계약금액 변경없음

○ 투입일자 변경(1차분)

- 향후 공정계획을 감안하여 재조정하고, 조경분야(초급)는 경춘선 숲길 3단계 설계 추진일정을 감안하여 조정

분 야	등 급	당초배치일	변경배치일	철수예정일	비 고
책임건설사업관리 기술자	고 급	2015.04.13	2015.04.13	2016.07.31	변경없음
조 경	중 급	2016.02.01	2016.02.01	2016.07.31	변경없음
조 경	초 급	2016.03.01	2016.04.01	2016.06.30
토 목	중 급	2015.07.22	2015.07.22	2016.07.31	변경없음
토 목	초 급	2015.12.21	2016.12.21	2016.05.21	변경없음
건 축	중 급	2016.02.15	2016.03.01	2016.05.31
기 계	중 급	2016.03.15	2016.03.15	2016.05.31	변경없음
전 기	특 급	2016.03.15	2016.03.15	2016.07.31	변경없음
정보통신	중 급	2016.04.23	2016.04.23	2016.07.31	변경없음

□ 건설사업관리기술단 의견

○ 건설사업관리기술자 배치변경은 향후 공정계획을 감안하여 재조정하였고, 조경분야(초급)는 경춘선 숲길 3단계 설계 추진일정을 감안하여 변경하였으며,

○ 추후 공정계획 변경 및 현장여건을 고려하여 건설사업기술자의 탄력적인 운영을 위하여 배치 변경

□ 보고자 의견

○『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』건설사업관리기술자의 배치변경사항에 대하여 현장여건 및 공정계획을 검토한 결과, 타당한 것으로 판단되어 배치변경을 승인하고자 함.

붙  임  건설사업관리기술자 배치변경 승인요청서 1부.  끝.