문서번호	건축부-1698
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		代전재진	전결 02/11 안재혁
협 조

「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」

실정보고 사항 검토 보고

2016. 2

도시기반시설본부

건  축  부

「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」

실정보고 사항 검토 보고

『서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사』와 관련하여 관급자재(레미콘)에 대하여 건설사업관리단의 사급변경 실정보고 사항을 검토 보고함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 서초구 내곡동 6-7번지 외9필지(서울시 어린이병원 내)

○ 규    모 : 지하2층/ 지상5층, 연면적 11,950.88㎡ (증축)

○ 공사기간 :`15. 1.20～`17. 2.19(1차:`15. 1.20～`15.12.20)

○ 시 공 사 : 대자개발㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜영화키스톤건축사사무소 외 1개사

○ 공 사 비 : 11,033백만원(1차:5,200, 2차:2,413)

□ 추진경위

○ `13.  4. 18 : 어린이병원 건립계획 수립

○ `13. 10. 31 : 공사의뢰

○ `14.  5. 13 : 설계용역 계약

○ `14. 12. 30 : 공사 계약 (`15. 1.20. 1차 공사 착수)

○ `15. 12. 21 : 2차 계약(~`16. 8.31까지)

○ `16.  1. 25 : 1차 준공

○ `16.  2.  5 : 책임건설사업관리기술자로부터 실정보고서 제출

□ 건설사업관리단 검토

○ 주요내용

- 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 현장 책임건설사업관리기술자로부터 관급자재 레미콘에 대하여 레미콘 노조의 준법투쟁과 수요과다등으로 관급레미콘 공급이 2월 22일이후에나 가능하여 공기지연이 우려됨으로 레미콘(25-24-15) 500㎥를 사급전환 요청

※ 어린이병원 16-06호(`16. 2. 5)

○ 검토결과

- 단가 검토 한 결과 관급자재대 67,120원/㎥(부가세포함) 가격으로 500㎥를 사급전환 하였을 경우 약 33,560천원의 도급공사비 증액이 사료됨

○ 물량변경 내용

구 분	품 명	규 격	단위	당 초	변 경	비 고
건축공사	레 미 콘	25-24-15	㎥	0	500	관급자재를 사급자재로 변경[증)33,560천원]

□ 도급비 : 증) 33,560,000원

○ 당 초 :   -

○ 변 경 : 33,560,000원

□ 검토 및 처리의견

○ 관급자재비(레미콘) 감액분을 도급비로 증액 변경하여도 관급자재비는 그 비용만큼 감액되므로 총공사비는 변경 없음.

○ 관급자재(레미콘) 사급변경 실정보고에 대하여 검토결과 책임건설사업관리기술자의 기술검토의견서와 같이 시공사의 실정보고 사항이 적정하여, 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경 처리코자 함.

붙 임  실정보고서 1부.  끝.