문서번호	방재시설부-1913
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	02/11 代이도헌
협조

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2016. 02

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」에 소요되는 관급자재(보차도경계석)의 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.5 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

관급자재 계약 현황

○ 계약건명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계) 관급자재(보차도경계석) 구매

○ 계 약 자 : 대한민국상이군경회

○ 납품요구번호 : 12-15-1-57671-00

○ 납품기한 : 2015.12.25

Ⅲ

납품기간 연기 사유

○ 납품기한 연기 사유

- 소요자재 투입시기 미도래

○ 납품기한 연기조치가 지연된 사유

- 착오로 적기에 연기조치 미실시

○ 귀책사유 : 발주처

○ 지체상금 : 미부과

○ 연기내역

납품요구번호	품 명	규 격	단위	수량	납 품 기 한		비 고
					변경전	변경후
12-15-1-57671-00	석재블록	200×250 ×1000	개	572	2015.12.25	2016.6.30	소요자재 투입시기 미도래
		200×250/100 ×1000	개	14
		200×100 ×1000	개	7

Ⅳ

조치계획

○ 계약수량에 대하여 납품기한 연기조치 하여 공사시행에 만전을 기하고자      함.

붙임 : 관급자재 납품기한 연기요청서 1부.  끝.