문서번호	방재시설부-1915
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	02/11 代이도헌
협조
	주무관		손병도

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」

토취장 변경 실정보고 검토

2016. 02

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

토취장 변경 실정보고 승인요청 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 와 관련하여 토취장 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘(감)-16–038(2016.01.27)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 토취장 현황

- 설  계 : 경기도 학암동 5-3

○ 토취장 변경 사유

- 설계 토취장은 현재 토공반출이 완료되고 암반 노출로 당 현장에 반입되기 어려운     실정으로 토석정보시스템을 활용하여 토취장 선정을 추진하였으나 반출시기 및     토질 상태가 맞지 않아 토취장 변경이 필요한 실정임.

○ 토취장 변경 현황

*************송파구 가락동 479(가락시영아파트 재건축 현장)

- 토취장 선정 운반거리 및 반입수량 : 19.9km, 3,837㎡

○ 물량검토

구 분	규격	단위	당 초	변 경	비고
1. 토공
순성토반입	무대	㎥	1,537	1,537
순성토반입		㎥	2,300	2,300	운반거리 변경 25km → 19.5km

○ 토사운반 단가 검토

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
단 가	10,566원/㎥	7,857원/㎥	감) 2,709원/㎥	낙찰율 85.496% 적용
적 용			○

○토취장 위치변경에 따른 공사비 검토                         (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 직접공사비	24,302	18,071	감) 6,231	낙찰율 85.496% 적용
2. 제경비	9,926	7,117	감) 2,809
3. 도급액	34,228	25,188	감) 9,040

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』 토취장 변경 실정보고에 대하여 검토한 결과 당초 설계 토취장인 경기도 하남시 학암동은 토공완료 및 암반 노출로 반입하기 힘든 실정이므로 토취장 변경 반입함은 타당하며,

○ 토취장 변경에 따른 운반거리 및 공사비 산출은 적정함.

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과 토취장 변경에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하여 차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.