문서번호	시설과-654
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	02/12 이춘희
협 조

2016년 옥상녹화·텃밭조성사업 계획

2016. 2

동부공원녹지사업소

(시설과)

2016년 옥상녹화·텃밭조성사업 계획

2016년도 옥상녹화 대상지로 선정된 서울세관 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성사업 계획을 아래와 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 계획 (조경과-1062, 2016.01.26.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울세관 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 사업기간 : 2016. 02. ～ 11.

○ 대 상 지 : 강남구 언주로 721 서울세관 등 2개소

○ 총사업비 : 508백만원

연번	시 설 명	규모(㎡)	사업비(백만원)			비 고
			계	시 지원액	자부담액
	계	1,450	508	333	175	-
1	서울세관	1,000	350	175	175	-
2	개포디지털혁신파크	450	158	158	-	-

□ 추진경위

○ 2016.01.26 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 계획 시달(市조경과→동부공원녹지사업소)

○ 2016.01.27 : 옥상녹화사업 협약서 및 동의서 발송

○ 2016.02.02 : 기술용역 타당성 심사 요청(건축물 구조안전진단 용역)

○ 2016.02.05 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

□ 세부 시행계획

○ 구조안전진단은 용역비가 소액(15,070천원)으로 전문업체에 수의계약 시행

○ 설계용역 및 공사는 옥상녹화 현장 특수성을 감안하여 사업대상지별로 나누어 각각 2건으로 시행

□ 향후 추진일정

○ 2016. 02 ~ 03 : 건축물구조 안전진단 및 옥상녹화 유형제안용역 시행

○ 2016. 04 ~ 06 : 실시설계 용역 시행

○ 2016. 07 ~ 10 : 공사 시행

○ 2016. 11        : 보조금 정산 및 시설물 인계

붙임 : 2016년 옥상녹화·텃밭조성 추진계획 시달 공문(서울시) 1부. 끝.