문서번호	방재시설부-2012
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	02/12 임춘근
협조	교량건설과장		박용택
	주무관		김동현

- 목동교 성능개선공사 -

지장수목 이식 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 목동교 성능개선공사 -

지장수목 이식 실정보고사항 검토보고

목동교(구교) 중차량노선 성능개선을 위하여 가교 설치에 저촉되어 공사에 지장을 주고 있는 수목에 대하여 관련기관(영등포구, 양천구, 시설관리공단)과 협의한 결과를 공사에 반영한 검토 보고임.

※ 관련공문 : 실정보고(한국종합(목동교) 제2016-37)

공사개요

○ 공 사 명 : 목동교 성능개선공사

○ 사업기간 : 2015.08.12. ~ 2017.08.11.

○ 규    모 : L=240m, B=19.9m(편도 5차로)

○ 도 급 비 : 102억원(조경 37백만원)

○ 시 공 사 : 용일토건(주)

○ 감 리 사 : 한국종합기술

추진경위

○ 2015.10.28. : 지장수목 처리 협의건 회신(양천구청→도기본)

○ 2015.11.09. : 지장수목 처리 협의 회신(영등포구청→도기본)

○ 2015.11.02. : 지장수목 처리 협조 회신(시설관리공단→도기본)

○ 2015.12.02. : 지장수목 처리 협의 회신(영등포구청→도기본)

○ 2015.12.18. : 지장수목 처리 협의결과 통보(양천구청→도기본)

감리단 실정내용 및 검토의견

공 종	수 종	규 격	수 량		증∙감	비 고
			변경전	변경후
수목이식 및 식재	가식	R14	40	-	감40주	적정
	정식	R14	36	-	감36주	〃
	버즘나무	R15	4		감4주	〃
	사철나무	H1.2	36	-	감36주	〃
영등포구간	소나무이식	R20~30	-	18주	증18주	〃
	소나무제거	R20~25	-	3주	증3주	〃
	잔디식재	0.3×0.3	-	180㎡	증180㎡	〃
	느릅나무이식	R15~27	-	4주	증4주	〃
	회화나무이식	R22	-	1주	증1주	〃
양천구간	소나무이식	R20~30	-	12주	증12주	〃
	미류나무이식	R10	-	5주	증5주	〃
	잔디식재	0.3×0.3	-	120㎡	증120㎡	〃
	눈주목이식	H0.4	-	25주	증25주	〃
	철쭉이식	H0.5	-	100주	증100주	〃
	조팝나무이식	H0.6	-	300주	증300주	〃
	버즘나무제거	R30~55	-	8주	증8주	〃
부대공	유용토운반	DT15톤	-	60㎥	증60㎥	〃
	임목폐기물처리	20KM	-	25.789톤	증25.789톤	재산출

감리단 의견

○ 목동교 성능개선공사의 지장수목을 이식후 가식 관리하여 원상복구        시 정이식 하는 것으로 설계 되었으나, 해당구청과 협의결과 해당구청        에서 필요로 하는 장소에 정이식으로 변경하는 것이 타당할 것으로         판단 됨.

○ 수목 현장조사 결과에 따른 규격 및 수량을 변경함이 타당할 것으로        판단 됨.

○ 원상복구비관련 비용에 대하여 담당구청과 협의 결과에 따라 추후          실정보고함이 타당할 것으로 판단 됨.

○ 신규비목 적용 단가산출은 협의율 90.698%로 함.

개략공사비 내역

(단위 : 천원)

구 분	공사금액		증․감액	비 고
	당 초	변 경
수목이식 및 식재	18,415	23,739	증5,324
직접공사비	18,415	23,739	증5,324
제경비	7,015	9,991	증2,976
공급가액	25,430	33,730	증8,300
부가세	2,543	3,373	증830
도급 공사비	27,973	37,103	증9,130

검토결과

○ 가교설치에 저촉되어 지장을 주고 있는 지장수목에 대하여 관련기관 (영등포구청, 양천구청, 시설관리공단)과 협의 후 협의조건에 따라 지정장소에 수목이식 작업을 시행하기로 한 사항으로 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공하고 추후 설계변경토록 실정보고 사항을 승인처리 함.

○ 복구계획은 공사기한내 별도 협의한 후 공사에 반영하고자 함.(협의조건)

○ 공사노임 단가는 2015년 하반기 단가로 산정하고 수목제거품은 타지역 반출 제거로 적용하고 흉고규격을 조정하여 산정토록하며, 임목폐기물 수량을 적정하게 조정하고 임목폐기물 처리 및 운반비는 내역서에 포함되지 않고 원가계산서 부가세 앞에 포함하도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 관련공문 1부.      끝.