문서번호	공간정보담당관-1591
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
곽인선		박대군	02/12 조봉연
협조	강남일반교량팀장		정회평
	도시공간설계팀장		윤근주

고가하부공간 활용사업을 위한 공간정보 제공계획

2016. 2.

정보기획관

(공간정보담당관)

고가하부공간 활용사업을 위한 공간정보 제공계획

고가·교량 하부공간을 시민을 위한 공간으로 활용하기 위한 고가하부공간 활용사업이 원활하게 추진될 수 있도록 정확한 공간정보를 제공

Ⅰ		고가하부공간 활용사업 지원배경

고가하부공간 활용사업 개요

❍ 추진근거

- 서울시 고가 하부공간 사용실태 및 재구성 방안 학술연구 (‘14. 6~9, 서울연구원)

- 고가하부 공간개선 사업추진 총괄부서로 도시공간개선단 지정 (‘15.11.25. 행정2부시장 방침)

❍ 고가하부 공간 활용사업 기본전략 수립

- 용역기간 : 2016. 3 ~ 2016. 12 (10개월)

- 용역내용 : 시범사업 기본구상 및 타당성 조사, 대상범위 확대 및 종합계획 수립

❍ 고가하부공간 활용 시범사업 조성

- 사업기간 : 2016. 7 ~ 2017. 3 (9개월)

- 사업내용 : 현상설계공모, 고가하부공간 활용 시범사업 조성

공간정보담당관 지원배경

❍ 부서별 협업을 통한 상생협력으로 서울시정을 효율적으로 추진

- 공간정보담당관에서 구축한 공간정보를 공유·연계

- 수요자 중심의 공간정보 협력체계를 마련하여 시정발전에 기여

❍ 고가하부 공간개선 사업추진 기반조성

- 공간활용 방안의 통합적 기획 및 조정에 필요한 기초데이터 제공

- 현황조사 및 분석을 위한 공간정보 구축 및 생산

❍ 서울형 뉴딜일자리「도시시설물 위치좌표 디자이너」업무 다각화

- 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 디자이너 양성

- 맞춤형 직무수행을 통한 민간일자리 진입 디딤돌 역할 수행

Ⅱ		고가하부 공간정보 구축

구축 개요

❍ 구축 근거

- 지식공유시스템 상상뱅크 협력제안 제558351호(2016.02.10.)

- 도시시설물 위치좌표 구축디자이너 사업 운영계획(2016.01.06.)

❍ 구축 방향

- 도시공간개선단 “고가하부공간 활용사업 추진계획”과 연계

- 공간활용의 기획 및 재구성에 필요한 정확한 기초데이터(공간정보) 제공

- 서울형 뉴디일자리 사업참여자 맞춤형 현장직무 능력배양

세부 구축계획

❍ 구축 범위

- 고가 125개소 현황 및 이용실태 전수조사

- 시범사업 대상지 1개소 및 우선 사업 대상지 5개소 현황측량(도시공간개선단 지정)

❍ 사업 기간 : 2016. 3. ~ 8.(6개월)

❍ 구축 방법

기본자료 수집
↓	· 수치지형도에서 고가(교량) 정보 추출 · 매년 서울시에서 구축하고 있는 공간정보를 활용
현장조사용 도면 제작
↓	· 교량안전과 협조: 기관별 고가 현황자료 및 이용실태 · 공간분석 및 현장조사용 도면 제작
이용실태 전수조사
↓	· 현장조사 현황카드(양식) 작성(도시공간개선단 협조) · 위치좌표 구축디자이너 현장 조사(2인 1조)
사업 대상지 선정
↓	· 도시공간개선단과 협의 · 시범사업 대상지(1개소) 및 우선 사업 대상지 순위 선정(5개소 이내)
공간정보 구축
	· 위성측량 : 기준점 설치 · 전자평판측량 : 구조물 절대좌표 및 면적 측정

❍ 구축 일정

구 분	2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
세부 구축계획 수립
현장조사용 도면제작
이용실태 현장조사 (125개소)
위치좌표 구축 (6개소)
공간정보 제공
완료보고서 작성

※ 고가하부 공간활용 추진계획에 의거 일정이 변경될 수 있음

Ⅲ		행정사항

소요 예산

❍ 측량장비 임대 : 3대(위성,전자평판) × 70만원 × 6개월 = 1,260만원

❍ 현장조사용 S/W 라이선스 및 기술지원 : 30개 × 8.8만원 = 264만원

관계부서 협조

❍ 도시공간개선단

- 현장조사 방법 등 사업참여자 교육 및 현장조사용 카드 제공

- 공간정보 검수, 구축 범위 등 사업 협업 추진

❍ 교량안전과

- 이용실태 전수조사를 위한 관리기관별 고가(교량) 현황 제공

❍ 토지관리과

- 지번 위치 색인을 위한 연속지적도 제공

기술지원 협조

❍ 한국국토정보공사 : 전자평판 운용 및 사용자 교육

❍ 중앙항업(주) : 수치지형도를 이용한 공간정보 분석

❍ AKT공간정보(주) : 필드메이트 사용자 ID 제공 및 운용 교육

Ⅳ		기대효과

❍ 고가하부공간 활용사업 기본전략 수립의 기초자료 사용

- 정확한 공간정보 기반에서 활용사업 기본전략 수립 가능

❍ 실제 활용 가능한 고가하부공간 파악가능

- 현장 답사 및 실측을 통한 실제 사업가능 대상지의 공간적 범위 파악

❍ 고가 및 교량시설물 하부공간 유지관리 활용

- 전수조사를 통한 기본정보를 활용하여 효율적으로인 시설물 유지관리

❍ 뉴딜일자리 업무 다각화로 사업참여자 취업기회 확대

- 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 기술·지식 배양