문서번호	교량안전과-2376
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
우창원	이수근	02/12 박문희

동작대교 보수공사(2차) 발주계획 보고

2016. 2.

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동작대교 보수공사 발주 계획

동작대교 정밀안전진단 및 실시설계결과에 따른 포장상태 노후, 강구조물 및 강재난간연석 부식 등에 대한 연차적 공사시행으로 구조물의 성능개선 및 내구성 증진, 시민의 이용편익, 시설물의 안전성을  확보하기 위한 장기계속공사발주(2차) 계획 보고임

Ⅰ		사업개요

사 업 명  : 동작대교 보수공사

사업위치  : 서울시 용산구 이촌동 ~ 동작구 동작동

사업기간  : 2015. 06 ~ 2017. 12.

사 업 비  : 총 18,773백만원

-  2015년(1차) : 9,000백만원, 2016년(2차) : 5,600백만원

향후(3차) : 4,133백만원

공사규모(총괄)

- 아스팔트 포장 219a, GUSS포장 216a, 중방식도장 139,909㎡,

차량방호책 강재연석보수 1,920m,  콘크리트보수(표면,단면) 11,175㎡

시 공 사 : ㈜케이에스씨건설 대표 정희공

계약방법 : 장기계속계약

Ⅱ		추진경위

2011. 4 ~ 2011. 12 : 동작대교 보수보강공사 실시설계

2011. 7 : 지방재정투융자사업 투자심사 완료

2012. ~ 2014 : 동작대교 보수공사 시행(장기계속)

2015. 3. 4. : 동작대교 보수공사 시행계획 보고(장기계속)

2015. 6 ~ 2015. 12 : 동작대교 보수공사(1차분) 시행

Ⅱ		사업 현황

연도별 예산내역

(단위 : 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	비 고
예산	18,773		9,000	5,600	4,133

연도별 공사추진 (주요공종)

구 분	아스팔트포장	GUSS포장	중방식도장	차량방호책 강재연석보수	콘크리트보수 (표면,단면)	비 고
계	219a	216a	139,909㎡	1,920m	11,175㎡
1차공사	219	216	48,479	1,920m		공사완료
2차공사			56,022			금회
3차공사			35,090		11,175	향후

Ⅲ		추진 계획

‘16. 2. : 2차 공사계약

‘16. 2.~ 12 : 공사시행

‘16. 12 : 준공예정

Ⅳ		조치계획

상기와 같이 2차 공사계약을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 동작대교 보수공사 시행계획 보고서 1부.

2. 연도별 보수 현황 1부.

3. 동작대교 보수공사 설계내역서 (2차분) 1부.

4. 동작대교 보수공사 설계내역서 (총괄) 1부.

5. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.