문서번호	시설과-849
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이강호	공헌구	심상원	02/12 송천헌
협 조
	전략기획실장		代김명준
	총무과장		이경로
	주무관		이상국

서울대공원 기린나라 정밀점검 및

보수·보강 계획(안)

2016.  2.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울대공원 기린나라 정밀점검 및 보수·보강 계획(안)

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의거 2종시설물인 기린나라에 대하여 정밀점검 용역을 실시하고, 지적사항에 대한 보수・보강공사를 시행하여 시설물의 기능과 안전을 유지하고 재해를 사전에 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

□ ‘16년 서울대공원 시설물 유지관리 예산

□ ‘16년 시설물안전 및 유지관리 계획(시설과-167. ‘16. 1. 11)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울대공원 기린나라 정밀점검 및 보수·보강공사

□ 사업기간 : 2016. 2 ~ 2016. 9

□ 사업금액 : 200백만원(예정)

○ 정밀점검용역 금액  -  15백만원

○ 보수·보강공사 금액 - 185백만원

□ 구    조 : 철근콘크리트 및 철골조

□ 규    모 : 지하1층 지상3층, 연면적 6,597.70㎡

□ 용도/준공일자 : 전시시설 / 2000. 6. 30.

□ 법적사항 : 시특법 제6조 및 동법시행령 제6조 제1항

○ 정밀점검 – 3년마다 1회 이상 실시

○ 2013년 정밀점검 시행(안전등급 - B등급)

□ 현황 사진

▲ 기린나라 전면	▲ 기린나라 후면
▲ 내부 놀이시설(3층)	▲ 내부 놀이시설(2층)

Ⅲ		용 역 내 용

□ 자료수집 및 분석

□ 현장조사 및 시험

□ 안전성 평가

□ 보수·보강방법 제시

□ 보수·보강공사 내역서 등 설계서 작성

Ⅳ		예산 및 사업발주

□ 예산금액 : 200백만원

□ 예산집행(예정)

○ 예산 200백만원 중 15백만원을 정밀점검 용역비로 사용하고          ○ 185백만원은 지적사항들에 대한 보수·보강공사 실시

※ 집행잔액 발생시(낙찰차액 포함) 긴급을 요하는 안전시설 보수공사에 사용

□ 예산과목

공원 이용시민 만족도 향상, 동물의 건강증진 및 종 보존, 동물사 관리기능   및 야생동물 종 보존, 공원안전시설 보수 및 정비, 시설비(401-01)

□ 계약방법

○ 정밀점검 용역  - 수의계약(소액)

○ 정밀점검에 따른 보수· 보강공사 - 공개경쟁입찰

Ⅴ		추 진 계 획

□ 추진일정

○ 2016. 2 : 기술용역 타당성 심사

○ 2016. 3 : 정밀점검 용역 발주 및 착수

○ 2016. 4 : 용역 준공

○ 2016. 6 : 공사 발주

○ 2016. 9 : 공사 준공

Ⅵ		행 정 사 항

□  총무과 : 기린나라 수탁자와 사업시행 시기 등 조율

붙임 : 정밀점검 대상시설물 위치도 1부. 끝.