문서번호	시설관리과-4549
결재일자	2016.2.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김철수	채재일	02/15 이승철

교통처리 용역 추진 계획

(연건동 185-2~종로5가 194-1번지외 1개소 송배수관 정비사업)

2016. 1

중부수도사업소

(시설관리과)

송배수관 부설공사에 따른 교통처리용역 추진계획

종로구 관내 2016년도 송배수관정비공사 시행건에 대하여 교통처리 용역을 추진하여, 도로 점용 공사로 인한 시민불편을 최소화 하고자 합니다

※ 관련공문 : 배수과-283(2016.01.11.)

1. 개 요

가. 용역명 : 연건동 185-2~종로5가 194-1번지외 1개소 교통소통 대책

나. 용역대상 개요

공사명	사업개요	도로명	도로 점용기간	비고
연건동 185-2~종로5가 194-1번지외 1개소 송배수관 정비공사	D=400~600, L=1,430m	대학로, 세검정로	180일

다. 용 역 비 : 29,260,000원

라. 용역기간 : 착공일로부터 60일간

마. 용역개요 : 상수도관 매설을 위한 이동식도로 점용 1,430m

2. 추진계획

가. 용역추진계획 방침 → 기술 용역 타당성 심사요청(시청 기술심사담당관)         → 용역발주 → 계약 → 교통소통대책심의회 심의 → 승인통보 → 공사착공

3. 용역내용

가. 용역목적 : 공사 중 교통대책의 질적향상을 도모하고, 도로점용 공사로 인한                   시민불편 최소화

나.추진근거 : 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조                     적용대상 3호

다. 과업범위 : 대학로(700m), 세검정로(730m) 상수도관 매설을 위한 이동식                    도로 점용

라. 주요과업 내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 사업지 주변 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

- 교통현황 및 분석

- 공사로 인한 교통영향 분석

마. 용역대가 산출근거

- 실비정액가산방식 : 교통관련계획 표준품셈(한국교통기술사협회 2016년)에          의해 산출된 투입인원에 대하여 적정 인원으로 투입비율 조정

4. 향후 추진계획

가. 2016.2.16. : 교통처리 용역타당성 심사요청(사업소→시청기술심사담당관)

나. 2015.2.25. : 심사결과에 의거 용역발주

다. 2015.2.29. : 용역착수(착공일로부터 60일)

첨부 : 1) 기술용역사업계획서 1부.

2) 설계서 1부. 끝.