문서번호	기전과-1568
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
심예선		양영민	02/15 배광환
협조
	주무관		윤석주

지하차도 노후 배수시설 개량공사 추진계획

2016. 2.

서부도로사업소

(기전과)

지하차도 노후 배수시설 개량사업 추진계획

장기사용으로 노후된 지하차도 배수펌프를 개량하여 우기시 고장에 따른 펌프가동정지 등 안전사고 위험요소를 사전에 정비하므로서 안정된 배수설비 구축 및 지하(보)차도를 통행하는 시민들의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업근거

○ 서울특별시 도로주요시설물 관리에관한 조례 (조례제5784호)

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에관한 규정 (훈령제942호)

□ 사업개요

○ 사업명: 증산지하차도 외 2개소 수중모터펌프 제작·구매·설치

○ 위치 및 규모

위치	규모	수량	시설연도	비고
증산지하차도	30kW	2	2001
	37kW	1
모래내지하차도	3.7kW	1	2002
	11kW	3
성산지하차도	11kW	2	2003	원활한 배수를 위해 용량증설 필요
	11kW→15kW	1

○ 총사업비: 200,000천원

○ 사업기간: 2016. 2. ~2016. 5.

□ 추진계획

○ 설    계: 자체설계

○ 발주방법: 조달발주

○ 사업기간: 계약일로부터 60일이내
※ 2016. 2. 5. 예산 재배정 완료(재배정부서: 도로시설과)

□ 추진일정

○ 2016. 2.01~2.15 : 현장조사 및 설계

○ 2016. 2.15~3.15 : 조달발주 및 계약

○ 2016. 3.16~5.06 : 착공 및 제작설치

○ 2016. 5.07~5.10 : 시운전 및 준공

□ 사업위치

□ 기대효과

○ 배수성능 향상으로 안정된 수방시스템 구축

○ 지하차도를 이용하는 시민의 생명과 재산보호.끝.