문서번호	수난구조대-855
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	수난구조대장	행정지원과장		119특수구조단장
박기석	홍성삼	권태미		02/15 김재학
협 조	지대장		이상영
	담당자		성재욱

뚝섬수난구조대 청사(바지선) 계류시설 개선공사 예산집행계획

119특수구조단

수난구조대

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

뚝섬수난구조대 청사(바지선)

계류시설 개선공사 예산집행 계획

홍수,태풍,강풍 등에 의한 한강수위의 급격한 변동과 청사의 요동으로 인명, 청사시설과 보유 선박의 보호를 위한 수중계류시설(앵카 및 앵카체인)보강과 효율적인 청사 계류장치를 확보하기 위한 공사 계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

수난구조대-83(2016.1.5.)호「2016년도 수난구조대 예산집행 추진계획」

Ⅱ		현실태

수상 시설물의 특성상 동계절 북서풍의 강한 바람과 집중호우를 동반한 태풍 발생시 선미(청사 후방)측 앵카 체인의 취약성으로 청사 동요로 인한 안전확보가 어려움.

청사 선미부 캡스턴 미설치로 인력에 의한 계류로프 견인력의 한계상 안전을 위한 견고한 계류로프(규격:50mm이상) 확보 불가.

선수부 대비 취약한 선미부의 앵카체인 규격과 길이로 인한 재해 사고 발생우려.

잠수풀장 보유로 인한 청사 무게중심 상승으로 외력(강풍,방류량증가 등)에 의한 요동현상이 심하게 발생.

고수부지 자전거도로 신설에 따른 청사 계류용(육상) 고정비트 미설치로 방류량 급증시 청사안전확보를 위한 계류로프 연장 불가.

Ⅲ		예산현황

예 산 액 : 190,000천원

예산과목 : 특수구조단운영/ 수난구조대운영/ 시설비

Ⅳ		세부추진계획

앵카체인 규격을 32mm(기존)에서 52mm로 교체

앵카체인 길이를 2Shot(50m)에서 4Shot(100m) 연장

※1Shot = 25Meter

캡스턴 설치(전동식, 청사 좌현 선미부 1개소)

육상 계류용 고정비트 설치(3개소)

추진일정

단 계		일 정		주 요 내 용
사전조사 및 시설 설계용역		2월중		◦공사에 따른 사전조사 및 시장조사 ◦기술용역 타당성 심사(기술심사담당관) ◦앵카 및 계류시설 개선공사 설계용역 발주
⇩
입찰 공고 및 계약 체결		3월중		◦본공사 입찰 공고 및 계약체결 ◦앵카 및 계류시설 개선공사 착공
⇩
준공확인 및 대금지급		4월~5월중		◦공사감독공무원 지정 및 준공검사 ◦대금 지급

※ 관계기관 협의 및 허가승인

○ 공사차량 및 공사현장 안전관리를 위한 협의

(한강관리사업본부, 뚝섬한강공원안내센터)

Ⅴ		향후 추진계획

연중 청사(바지선) 관리상 파악된 미비점을 보완하기위한 최적의 설계․공사 진행 유도

365일 시민수상안전교육 수요 증가에 따른 방문객 증가대비 안전한 청사시설 관리 유지

이상기후 발생시 능동적인 대처로 청사시설의 자연재해 피해 근절.   끝.