문서번호	급수설비과-1452
보존기간	년
결재일자	2016.2.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수설비과장	급수부장
이재학	김기상	02/16 이규상
협 조

상수도공사 건설사업관리용역 (강북지역)

급수공사 주간실적 보고

2016. 2. 15.

상수도사업본부

(급수설비과)

상수도공사 건설사업관리용역(강북지역)

급수공사 주간실적 보고

상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역에 대한 용역사로부터 제출된 주간실적을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 용역현황

□ 용역개요

○ 용역대상

- 급수공사 분야 (급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 18,980건

- 누수복구 분야 (누수복구,포장,공사장 입회 등) : 19,836건

- 시설물 분야 (노후밸브교체, 배수지 시설물 등) : 6,076건

○ 용역기간 : 2015. 6. 22 ~ 2017. 6. 21

○ 계약금액 : 4,888,436,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링,(주)신성엔지니어링

□ 인력배치 현황

○ 배치위치 : (중부, 서부, 동부, 북부)수도사업소

○ 근무인원 : 총 34명

- 급 수 14명, 누수 12명, 시설물 6명, 책임기술자1명, 비상주 1명

Ⅱ. 주간 추진실적

□ 추진기간 : 2016. 1. 25.~ 1. 31.

□ 추진실적

○ 급수공사(건설사업관리기술자)

구 분		건설사업관리기술자			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		256	231	25	90.2	463	1
누계	’16.1.1누계	771	702	69	91.1	1,912	4
	’15.6.22 이후	6,713	6,033	680	89.9	28,324	73

- 시정조치(1) : 안전 (1건)

○ 포장복구공사(건설사업관리기술자)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독(건)	입회율 (%)
금 주	84	74	88.1	20	20	100	64	54	84.4
누 계	453	395	87.2	102	100	98.0	351	295	84.1

○ 건설사업관리기술자 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수 공사	누수 복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물
금주(회)	4	1	3	0	4	1	3	0	0	0	0	0
누계(회)	21	5	16	0	21	5	16	0	0	0	0	0

붙임 : 강북지역 건설사업관리용역 주간실적 보고 1부. 끝.