투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(돈화문 국악예술당 건립공사)

우리 본부에서 시행 중인 『돈화문 국악예술당 건립공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

자재명	계약번호	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당 초	변 경
수배전반	12142268300	㈜동보파워텍 대표 심승용	56,500,000	‘16.02.29	‘16. 03. 25
디젤발전기	00137038802	보국전기(주) 대표 곽기영	27,290,000
LED조명등	00147017807	엘이디라이팅(주) 대표 성종제	26,428,000		‘16. 03. 31
	00157024900		1,179,900
	22143135509		840,000
전력및조명제어	12152144300	로지시스템(주) 대표 노경호	58,000,000
음향설비	12152142700	㈜디라직 대표 박성기	109,100,000
CCTV설비	12152151700	이노뎁(주) 대표 이성진	33,500,000

나. 연기사유: 선행공종 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량: 변경없음

라. 지체상금 부과여부: 미부과

따로붙임  1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	02/16 권오식
협조자
시행	설비부-2243	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개