문서번호	설비부-2232
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	02/16 권오식

‘돈화문 국악예술당 건립 전기, 통신공사’

- 관급자재 납품기한 연기 검토 보고 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 돈화문 국악예술당 건립 전기, 통신공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『돈화문 국악예술당 건립 전기, 통신공사』와 관련하여 감리원으로부터 관급자재 납품기한 연기 요청이 있어 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1. 검토근거

○ ㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문감 제16-38호(2016.2.16.)호

- 돈화문 국악예술당 전기, 통신분야 관급자재 납기 조정요청 검토 보고

2. 공사개요

건 명		전 기 공 사	통 신 공 사	비 고
공사기간	총차	2013.12.23.~2016.02.29.	2013.12.23.~2016.02.29.
	3 차	2015.11.25.~2016.02.29.	2015.11.25.~2016.02.29.
계약금액	총차	금521,954,000	금312,708,000
	3차	금321,950,000	금222,862,000
계약자		삼언전공㈜ 대표 공석복	㈜에스앤티에스 대표 이청대
감 리 사		영화키스톤건축사사무소

3. 기간연기 검토내용

○ 감리원 검토의견

- 선행공정인 건축공사 준공기한이 2016년 3월 31일로 관급자재 설치 시기가 미도래하여 선행공정에 맞추어 관급자재 납품기한을 연기함이 적정.

4. 준공기한 연기검토

○ 관급자재 납품기한 변경

구 분	계약업체	계약금액	당 초	변 경	비 고
수배전반	㈜동보파워텍	56,500,000	2016. 02. 29.	2016. 03. 25.	증)25일
디젤발전기	보국전기(주)	27,290,000

구 분	계약업체	계약금액	당 초	변 경	비 고
LED조명등	엘이디라이팅(주)	26,428,000	2016. 02. 29.	2016. 03. 31.	증)31일
		1,179,900
		840,000
전력및조명제어	로지시스템(주)	58,000,000
음향설비	㈜디라직	109,100,000
CCTV	이노뎁(주)	33,500,000

※ 계약금액 변경 없음

○ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 보고자 검토의견

○ 선행공정인 건축공사 준공기한이 2016년 3월 31일로 전기, 통신공사가 지연됨에 따라 관급자재 설치시기가 미 도래하여 감리원의 관급자재 납품기한 연장 보고가 타당한 것으로 판단되어 관급자재 납품기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 1. 관급자재 납기 조정요청 검토 보고 공문 1부.

2. 관급업체 공문 및 합의각서 각 1부  끝.