보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	代정헌석	02/16 이자화

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현  황

작업지시 번호	위 치	작업승인 공문	비 고
신설-182	보라매동 710-4	급수운영과-2152(2016.01.29.)
신설-183	보라매동 710-5	급수운영과-2153(2016.01.29.)
신설-184	보라매동 713-102	급수운영과-2232(2016.02.01.)

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 공사현장의 자재적치로 인하여 부득이 공사연기가 필요한 실정임

- 연기기간 약 45일간

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-182	2016.02.11.~2.22.	2016.02.11.~3.31.
신설-183	2016.02.11.~2.22.	2016.02.11.~3.31.
신설-184	2016.02.11.~2.23.	2016.02.11.~3.31.

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.