문서번호	도시철도토목부-1782
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
임경태		김정수	02/16 김진팔
협조
	주무관		장대성

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지역난방 관로 이설방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.2

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지역난방 관로 이설방안 검토 보고

본공사의 본선구간에 지역난방 관로는 매달기로 설계되었으나 현장확인(줄파기) 결과 H-pile Line에 저촉되어 당초 설계대로 가시설 시공이 어려움에 따라, 이에 따른 가시설 계획변경코자 실정보고한 사항에 대한 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 공사계약일반조건 제6절(공사의 설계변경), 제7절(계약금액의 조정)

○ 대한(하남) 제16-55호(2016.2.12.) 지역난방 저촉에 따른 처리방안 실정보고 사항

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 :   471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 본선(693.45m~888.2m) 구간의 현장확인(줄파기) 결과 지하지장물{지역난방관 D65mm(2열), D150mm(2열)}이 H-pile Line에 저촉되어 당초 설계대로의 가시설 시공이 어려움이 있어 이에 따른 변경사항 검토 보고임.

□ 지장물 현황

○ 설계 현황

- 지장물명 및 제원: 지역난방관로( 1열 : D150mm, L=199M)

- 좌측 측벽 H-Pile 라인내측 1.1~1.3m 이격되어 지장물 매달기

○ 현장확인(줄파기) 결과

- 지역난방관로( D65mm,L=25.4M(2열)) ,위치: 693.45m~716.2m

- 지역난방관로( D150mm,L=172M(2열)),위치: 716.2m~888.2m

- 좌측 측벽 H-Pile 라인에 저촉되어 H-Pile 시공이 어려움

< 현황도>

○ 이설계획 현황도

- 일부(L=39.30m) 보도측 이설+가시설 H-Pile 외측설치 (L=155.450m, 가시설폭 확대)

지역난방관로 평면도 (시행방안)
상세 A-A	상세 B-B	상세 C-C	상세 D-D

□ 공사비 증 · 감 현황

○ 설계현황

구 분			공사비	비 고
도급 공사비	직접 공사비	1.토 공	△107.6백만원
		2.흙막이 및 복공	△4.1백만원
		3.포장공	△0.5백만원
		4.지장물보호 및 복구공	▽19.2백만원
		5.사급자재비	△12.1백만원
		소 계	△105.1백만원
	간접비		△19.7백만원
	기타	일반관리비및 이윤	△7.1백만원
	계		△131.9백만
관급비	이설비		△245.5백만원	나라에너지(주) 견적서참조
총 계			△377.4백만원

□ 원설계자 의견 : 단면변화에 따른 구조안전성 검토

○현장조사결과 측면말뚝을 좌측으로 1.0~1.3m 이동함에 따라 굴착폭과 버팀보 길이가 증가하게 됨.

○ 측면파일 1.0~1.3m 이동 설치할 경우 토압조건의 변경이 없으므로  구조검토시 변경사항은 버팀보 길이 증가로 버팀보 안전율이 감소할 수 있으나, 당초 버팀보 허용응력 산정시 적용한 버팀보의 계산지간이 7.8~8.3m로 중간말뚝과 우측말뚝의 지간길이를 적용한 사항이로 좌측말뚝 이동시 증가된 좌측벽지간장(5.9m)이 계산지간보다 작으므로  구조계산상 안전율에 변동이 없으며,측면말뚝변위 및 모멘트 증가량이 미소하여 전체안정성에 미치는 영향이  영향이 없을 것으로 판단됨

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 시공사가 제시한 3가지 방안 검토결과 지역난방관 보도부 이설+가시설 확대 및 매달기 방안이 공사비,공정,품질,안전상 유리한 것으로 판단 되며

○ 공사비 산출은 아래와 같이 산출된 추정 개략공사비로서

- 이설공사비 : 나래에너지(주) 견적서에 기초하여 산출된 개략공사비

- 매달기 비용 : 가시설 폭확대(H-Pile 죄측이동설치)에 따른 개략추정 공사비

○ 추가되는 공사비는 발주처 승인후 설계변경시 상세 산출하여 설계에 반영.

Ⅳ		보고자 의견

○ 원설계와 현장확인(줄파기) 검토 결과 지역난방 매설위치가 상이하여 설계도와 같이 가시설 시공이 불가함에 따라 보고된 사항으로,

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 승인조치하고, 증가된 도급공사비는 우리부 설계변경자문위원회(소위원회) 자문을 거쳐 설계변경에 반영코자 하오며,

○ 증가된 도급공사비와 이설비는 총사업비 변경시 반영하여 조정 코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.