문서번호	공간정보과-1301
결재일자	2016.2.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	02/17 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사(3차) 신청계획

2016. 2.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사(3차) 신청계획

『2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』으로 시행한 공공측량 완료구간 성과물에 대한 공공측량성과심사(3차) 신청계획을 보고드림.

Ⅰ		개 요

추진근거 및 목적

❍「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제18조제5항 및 동법 시행규칙 제22조제4항에 따라,

❍ 공공측량한 성과를 심사수탁기관에 심사를 받아,

❍ 공신력을 통한 정확도 향상 및 품질을 확보하도록 하기 위함.

대상사업 : 2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(DB구축 631㎞, 4,656백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 219㎞ (신설 40㎞, 기존 179㎞)	측량 및 편집 : 191㎞ (신설 20㎞, 기존 171㎞)	측량 및 편집 : 221㎞ (신설 45㎞, 기존 176㎞)
용역기간	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 4. ～ ’16. 3. 31.
계약금액	1,420백만원	1,506백만원	1,730백만원
사 업 자	중앙항업㈜ 외 2 [㈜제일항업, ㈜해양정보기술]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [범아엔지니어링㈜, 한국에스지티㈜]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

신청대상 : 탐사/측량 및 편집이 완료된 성과(DB구축 36㎞)

심사기관 : 한국공간정보산업협회(前대한측량협회)

심사방법 : 실내 및 현지심사(무작위 표본추출)

신 청 일 : 2016. 2. 22.(월)

Ⅱ		세부내용

성과심사물량

❍ 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
사업물량		631.0km	218.7km	190.8km	221.5km
심사물량	계	636.2km	219.7km	191.8km	224.7km
	전회	600.2km	208.4km	180.3km	211.5km
	금회	36.0km	11.3km	11.5km	13.2km

❍ 서북지역 : 금회 11.3㎞

구 분	목표물량	성과심사물량			비 고
		계	전 회	금 회
계	218.7km	219.7km	208.4km	11.3km
신설관로	39.8km	40.2km	28.9km	11.3km
기존관로	178.9km	179.5km	179.5km	-
4급 기준점	13점	65점	65점	-

❍ 서남지역 : 금회 11.5㎞

구 분	목표물량	성과심사물량			비 고
		계	전 회	금 회
계	190.8km	195.7km	184.2km	11.5km
신설관로	20.3km	20.5km	9.0km	11.5km
기존관로	170.5km	175.2km	175.2km	-
4급 기준점	11점	72점	72점	-

❍ 동남지역 : 금회 13.2㎞

구 분	목표물량	성과심사물량			비 고
		계	전 회	금 회
계	221.5km	224.0km	210.8km	13.2km
신설관로	45.7km	46.9km	33.7km	13.2km
기존관로	175.8km	177.1km	177.1km	-
4급 기준점	13점	97점	97점	-

Ⅲ		향후계획

❍ 신청물량에 대한 용역업체간 교차검사 : 2016. 2. 23.~ 3. 4.

❍ 성과심사비 납부 : 고지서 수신 후 7일 이내

❍ 준공시행 : 2016. 3. 31.

붙임 : 1. 성과심사물량 및 목록 현황 1식

2. 관련법령 및 공공측량 작업흐름 1부.  끝.