투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	납품기한 연기의뢰 (2016년 꽃모생산용 프러그묘 구매)

2016년 꽃모생산용 프러그묘(2기) 구매와 관련 아래와 같이 납품기한을 연기하고자 합니다.

1. 계약건명 : 2016년 꽃모생산용 프러그묘구매

2. 납품기간 : 2016. 2. 24

3. 계약업체 : 에버팜(주)  대표 최진성(☎031-275-4430)

4. 계약금액 : 금33,336,900원(금삼천삼백삼십삼만육천구백원)

5. 납품기간 연기

○ 당 초 : 2016. 2. 24

○ 변 경 : 2016. 3. 31(36일 연장)

6. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소 조경지원과

7. 지체상금 부과여부 : 미부과

8. 연기사유 : 2기 꽃모 식재지 정비와 식재인원 부족으로 기간제

근로자 채용하여 식재하고자 납품기한을 연기하고자 함

9. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리,

재료비.

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	조경지원과장
주무관	이용택		조경지원과장	02/17 김제중
협조자	주무관	代서정남
시행	조경지원과-681	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-2133-2127	/전송	02-2133-1082	/	yongtaek1@seoul.go.kr	/	대시민공개