문서번호	토목부-3140
결재일자	2016.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		여용석	02/18 김영수
협조
	주무관		윤창렬

설계용역 설계변경 및 준공기한 연기 보고

( 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계)

2016. 2.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

설계용역 설계변경 및 준공기한 연기 보고

( 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계)

현재 추진 중인『중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계』용역 1차의 계약금액 및 용역기간을 총차와 동일하게 조정하는 보고임.

※ 계약금액(1차) : 당초)200백만원    → 변경)278백만원 (증78백만원)

준공기한(1차) : 당초)2016. 2.20. → 변경)2016. 3.29. (증 38일)

▢ 용역개요

◦ 용 역 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계

◦ 위    치 : 노원구 하계동 학여울청구아파트~월계동 월계역(중랑천)

◦ 용역내용 : 보행교량 설치 폭4.5m, 연장206m

월계역 입구 교차로 주변도로 구조개선 (경원선 철도교 하부)

◦ 용역기간 :′15. 9.15.~′16. 2.29. (1차 : ′15. 9.15.~′16. 2.20.)

◦ 용 역 비 : 금277,869,000원 (1차 : 200,000,000원)

◦ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜경진엔지니어링

▢ 추진현황 (공정률 : 89%)

◦ '08.10. ~ '09.01. : 타당성 조사 및 기본계획(송파구청)

◦ '07.11.26. ~  '08.11.20. : 기본 및 실시설계

◦ '15.05.14. : 시장 우원식 국회의원 면담

- 보행교 설치 조속 추진 및 보행안전 확보 위해 마들로 횡단 추가 연장 요청

◦ '15.05.20. : 보행교량 설치 추진 방침 (하천관리과)

- 보행교량 마들로 추가 횡단에 따른 재설계

◦ '15.09.15. : 설계용역 계약 및 착수

◦ '15.09.22. : 주민설명회 개최

◦ '15.12.16. : 설계자문회의

◦ '16.01.16. : 하천점용 사전 협의 (국토교통부)

▢ 보고내용

가. 설계변경 및 준공기한 변경 사유

◦ 2015년 설계 예산(200백만원) 부족으로 예산에 맞추어 내역을 분개하여 차수 계약(1차)을 시행하였으나,

◦ 2016년도 예산이 확보된바 실시설계의 원활한 용역 수행을 위하여 1차 계약의 용역비 및 용역기간을 총차와 동일하게 조정

나. 용역비 및 용역기간 변경내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
용 역 비	총차	277,869	277,869	-	변경없음
	1차	200,000	277,869	77,869
용역기간	총차	'15.09.15~'16.03.29	'15. 9.15.~'16.03.29	-	변경없음
	1차	'15.09.15~'16.02.20	'15. 9.15.~'16.03.29	증)38일

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 실시설계의 원활한 용역 수행으로 설계 품질 확보를 위하여 1차와 총차의 용역비 및 용역기간을 동일하게 조정하여 설계 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

▢ 향후계획

◦ '16. 2. : 설계VE, 건설기술심의

◦ '16. 3. : 실시설계 준공

붙임 : 1. 설계내역서(변경, 1차) 1부.

2. 예정공정표(변경, 1차) 1부.  끝.