투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 책임감리원 귀하
(경유)
제목	마곡지구내 재생수 공급시기 조정에 따른 공사 중지 요청

1. 물순환정책과-2177(2016.2.5.)호와 관련입니다.

2. 서울시 물순환정책과 “마곡지구내 재생수 공급시기 조정 계획”방침에 따라 종합시운전이 2016.12월로 조정되었으니, 종합시운전 전까지 전기공사 중지 및 간접비 발생 최소화를 위한 전기공사업체 관리사무소 폐쇄 및 관리 인력 철수 등 조치를 취하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박시현		환경설비과장	02/19 여인웅
협조자
시행	설비부-2465	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 도시기반시설본부 설비부(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	pshyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개