투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	부진공정 만회대책 제출 및 공사계약사항 이행 촉구

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀 사에서 우리시와 공사계약 체결하여 공사중에 있는 재사용플라자 건립공사에 대하여 건설사업관리단에서 아래와 같은 공기지연 사유에 대하여 부진공정 만회대책 제출을 촉구하였으나 현재까지 제출치 않고 있어 지속적으로 공정이 지체되어 2차공사 계약기간(2016년 6월 30일)까지 준공될 수 없는 경우에 해당될 것으로 판단되므로 계약상대자인 귀 사에서는 2차공사계약사항에 이행에 필요한 부진공정 만회대책 방안을 마련하여 2016. 2.25(목)까지 건설사업관리단에 제출하시기 바랍니다.

1) 시공사 공기지연 주요 사유(2016. 2.18현재)

○ 계획 28.78% 실시 23.65%, 계획대비 82.18%로 17.82% 지연

○ 토사반출 목표량 미달

○ 흙막이 가시설 지연

○ 장비 추가 계획수립후 미투입등

3. 상기 기한내 부진공정 만회대책(인력·장비·자재의 월별 상세투입계획, 우기를 반영한 공정계획등) 미제출(대책이 미흡이 경우 포함)시에는 건설기술진흥법 제53조 및 동법 시행령 제87조 별표8 건설공사등의 벌점관리기준에 의거 벌점부과 및 2차공사 계약이행사항 미이행시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법 제30조(지연배상금)등 관련규정에 따라 행정처분할 예정임을 알려드리니 이점 각별히 유념하시기 바랍니다.

4. 아울러, 계약상대자인 시공사(동원건설산업 대표이사, 서우건영 대표이사)와 건설사업관리용역사(펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사), 발주처(건축부)간  2차공사계약 이행을 위한 공사관계자 대책회의를 2016. 2. 26(금)까지 개최(장소 : 건축부 회의실, 참석자 : 시공사 대표이사, 건설사업관리용역사 대표이사)코자 하오니 우리시 도시기반시설본부 건축부로 기한내 래방하시어 2차공사계약사항 이행에 차질이 없도록 적극적인 업무 협조를 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 6층 동원건설산업(주) 대표이사 김 영 현 귀하,서울시 송파구 백제고분로17길54(잠실로 선영빌딩2층) (주)서우건영 대표이사 김 기 수 귀하
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	02/19 안재혁
협조자
시행	건축부-2085	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)