문서번호	급수운영과-3215
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		북부수도사업소장
최용진		이계환		02/22 박용진
협 조
	지방시설사무관대우				이승완

2016년 공릉배수지(3,4지) 내부방식공사 추진계획

2016. 2

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

16년 공 릉 배 수 지(3,4지)  내 부 방 식 공 사  추 진 계 획

‘16년 시행예정인 공릉배수지(3,4지) 내부 방식공사에 대하여 배수지 특성 등을 감안하여 본부 공법계열 심의 요청후 선정결과에 따라 아래와 같이 진행하여 공사 추진에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		시행개요

□ 근  거

❍ 상수도시설물 내부방식 공법 선정 세부평가 및 기술심의 운영기준

(본부 시설관리과-36호 ’16.1.5)

□‘16년 방식공사 대상 배수지 보수물량 현황

시설물명	내부방식	단면복구	균열보수	철근노출	비고
계	35,030㎥	5,500㎡	1000m	22㎡ 미만	전면 보수
공릉배수지(3지)	17,515㎥	2,800㎡	650m	11㎡ 미만	전면 보수
공릉배수지(4지)	17,515㎥	2,700㎡	350m	11㎡ 미만	전면 보수

□ 시행방안

- 소요예산 :  4,060백만원

- 사업기간 : ‘16. 4. ~ ’16. 12.

- 입찰참가 : 건설산업기본법에 의한 전문공사사업중 시설물유지관리업에 등록한 업체

Ⅱ		추진일정 및 절차

□ 구조물 부위별 시공방안 공법계열 선정요청(본부 시설관리과)

❍ 내부방식(바닥,벽체,천장) 공법계열 선정요청 : 2016년 2월 중

□ 사업추진 및 기술심의위원회 개최방침(사업소)

❍ 기술심의위원회 개최 : 2016년 3월 중

□ 사업추진 기간 : 2016. 3 ~ 2016. 12

□ 향후 사업추진 업무흐름도 (절차)

【업무 흐름】				【주요 내용】	【기간】
	구조물 부위별 계열 선정요청 (발주부서)			▪구조물 규모, 특성, 환경 등을 고려하여 부위별 계열 선정 검토(안)를 작성 계열 선정요청 ▪발주부서 → 본부(시설관리과, 생산관리과)에 요청
	구조물 부위별 계열 선정 (내부 검토회의 개최)			▪구조물 환경 및 형식에 따라 부위별(바닥,벽체,천정) 계열 (도막, 시트, 패널) 선정을 위한 내부 검토회의 ▪본부(시설관리과, 생산관리과) → 발주부서에 결과통보
	사업 추진방침 (발주 부서)			▪사업 추진 및 기술심의위원회 개최방침 (결재권자 기관장)
	사업참여신청 공고			▪공법별 기술협약 및 평가자료 요청 ▪시, 상수도 및 자치구 홈페이지 공지	14일
					7일
	객관적 평가 및 기술심의자료 준비			▪기술심의위원회 개최에 필요한 자료 준비
	기술심의위원회 개최			▪심의위원 선정 ▪평가표에 의한 평가 시행 (배점, 주관적 평가, 종합평가) ▪심의결과 상수도 홈페이지 공개	1일
	신기술 활용심의 및 공사설계 등			▪선정 공법이 건설신기술인 경우 신기술 활용심의 요청 (본청 기술심사담당관)	30일
	계약심사, 입찰공고 등 사업추진				30일 (최대 82일)

※ 기간은 개략적 소요일수로 사정에 따라 변동 가능

Ⅲ		시설현황 및 보수개요

□ 공 사 명 : 공릉배수지(3,4지) 내부방식공사

□ 위   치 : 서울시 노원구 공릉동 141-4

□ 공릉배수지 시설현황

구 분	공릉배수지 (3지)	공릉배수지 (4지)	비 고
위 치	서울시 노원구 공릉동 141-4
구조(규격)	철근콘크리트 (80m×60m×7m)	철근콘크리트 (80m×60m×7m)
용 량	31,150㎥	31,150㎥
설치년도	1998
배수지 표고	H.W.L 71.6m, L.W.L 65m	H.W.L 71.6m, L.W.L 65m
안전진단	‘14년 정밀안전진단 B등급	‘14년 정밀안전진단 B등급
배수지상태	내부(상부슬라브,바닥,벽체, 도류벽,기둥 등) 전반적 균열,백태,공용열화,전반적인 침식발생	내부(상부슬라브,바닥,벽체, 도류벽,기둥 등) 전반적 균열,백태,공용열화,전반적인 침식발생

□ 공릉배수지 보수내역 현황

구 분	배수지 규격 (가로*세로*높이)	배수지 용량 (㎥)	비 고 (배수지 시설물)
계		170,000
공릉배수지 1지	70m×50m×7m	22,700	2011.7 ~ 2012.01 (에코플래시 방식 완료)
공릉배수지 2지	70m×50m×7m	22,700	2011.7 ~ 2012.01 (에코플래시 방식 완료)
공릉배수지 3지	80m×60m×7m	31,150	2016년 내부방식 실시
공릉배수지 4지	80m×60m×7m	31,150	2016년 내부방식 실시
공릉배수지 5지	80m×60m×7m	31,150	2017년 내부방식 예정
공릉배수지 6지	80m×60m×7m	31,150	2017년 내부방식 예정

배수지 전경	배수지 단면도

□ 공릉배수지 상부전경 및 내부전경

족구장(1지 상부)		테니스장(2지 상부)

야구장(3지, 4지 상부)		축구장(5지, 6지 상부)

<3지 전경>		<4지 전경>

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

❍ 본부(시설관리과) 내부 심의위원회에서 결정된 구조물 부위별 공법(도막, 패널, 시트)계열로 관련 절차에 의하여『16년 공릉배수지(3,4지) 내부방식공사』를 시행하고자 함.