문서번호	설비부-2559
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
지장환	여인웅	02/22 권오식

‘서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 리모델링 건립 전기, 통신공사’

- 관급자재 납품기한 연기 검토 보고 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 건립 전기, 통신공사

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 건립 전기, 통신공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고드림.

1. 공사개요

구분		전 기 공 사	통 신 공 사	비 고
공사기간	총차	2015.11.01.~2016.03.31.	2015.11.01.~2016.03.31.
	2 차	2016.02.05.~2016.03.31.	2016.02.05.~2016.03.31.
	1 차	2015.11.01.~2016.02.29.	2015.11.01.~2016.02.29.
계약금액	총차	금341,258,000원	금96,646,000원
	2차	금319,258,000원	금87,980,145원
	1차	금 22,000,000원	금 8,665,855원
계약자		㈜금송전기 대표 신중현	삼정정보통신 대표 이순봉
감 리 사		㈜성우이엠이 대표 조정환	-

2. 보고내용

○ 납품기한 연기사유 : 선행공정(건축공사)지연으로 관급자재 설치시기 미도래

○ 납품기한 변경내용

구 분	계약업체	계약금액	당 초	변 경	비 고
LED조명등	㈜대진디엠피	4,924,500원	‘16.02.29	‘16.03.31.	증)31일
	㈜썬레이	88,764,000원
분전반	㈜케이디파워	36,179,000원
전자교탁	주식회사비앤에스미디어	9,300,000원
영상 감시장치	이노뎁(주)	50,000,000원
방송장치	㈜디라직	139,000,000원

※ 계약금액 변경 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

3. 조치의견

○ 선행공정인 건축공사 마감공정 등 지연으로 전기·통신의 관급자재 설치시기가 미 도래하여 납품기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 관급자재 납기 조정요청 검토 보고 공문 1부.

2. 관급자재 합의각서 각 1부  끝.