투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(서울인생이모작지원센터50+캠퍼스 리모델링 전기공사)

우리 본부에서 추진중인『서울인생이모작지우너센터50+캠퍼스 리모델링 전기공사』와 관련하여 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울인생이모작지우너센터50+캠퍼스 리모델링 전기공사               나. 변경사유 : 선행공종(건축) 지연에 따른 납품기한 연기

다. 납품기한 변경내용

납품요구번호	계약자	계약금액	납품기한		비고
			당 초	변 경
12-15-2-48053-00	(주)대진디엠피	4,924,500	‘16.02.29	‘16.03.31
12-15-2-48054-00	(주)썬래이	81,524,000
12-15-2-48052-00	(주)썬래이	7,240,000
12-15-2-48088-00	㈜케이디파워	36,179,000

라. 예산과목 : 복지본부어르신복지과, 어르신복지수준향상 및 장사시설운영내실화, 치매어르신지원강화, 어르신 복지시설설치지원, 시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의서 각 1부.

3. 관급자재 계약서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	지장환		환경설비과장	여인웅		설비부장	02/22 권오식
협조자
시행	설비부-2566	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	부분공개(7)