투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	계약기간 변경요청 수정 의뢰(시립영보정신요양원 석면해체·제거 감리 및 농도측정 용역)

1. 건축부-1972(2016.2.18.)호의 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 “시립영보정신요양원 석면해체·제거 감리 및 농도측정 용역”에 대하여 석면해체·제거공사 착공 지연에 따라 당해 용역 계약기간을 아래와 같이 수정하여 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

-	아	래	-

구 분	계 약 기 간		비고
	당 초	변 경(수정후)
석면해체·제거 감리 및 농도측정 용역	2016.2.1.~2016.2.21.	2016.2.1.~2016.3.15.

붙임  용역업체 공문 사본 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이광휘		의료시설과장	김충범		건축부장	02/23 안재혁
협조자
시행	건축부-2172	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어 플레이스빌딩도시기반시설본부 건축부(13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-2617	/전송	02-2133-2659	/	khyi0293@seoul.go.kr	/	대시민공개