투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계))

1. 재무과-59669호(2015.12. 4.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설(2단계) 실시설계용역

나. 위     치 : 송파구 잠실나루역 연결교차로 ~ 아산병원앞 도로

다. 용역개요 : 도로개설 폭2~3차로, 연장710m (교량135m 포함)

라. 계 약 자 : ㈜동성엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜정호이앤씨, ㈜세코지오, ㈜미동엔지니어링

마. 준공기한 연기 현황

구 분	용 역 비	계 약 기 간		비 고
		변 경 전	변 경 후
총 차	500,640,000원	′15. 7.22. ~ ′16. 2.29.	′15. 7.22. ~ ′16. 5.31.	증)3개월

바. 예산과목 : 도로 건설, 간선도로망확충(도시개발특별), 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설, 시설비 및 부대비, 시설비

사. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 올림픽대로 선형 변경에 따른 시설물(취수장) 관리기관 및 하천점용 협의 등을 위한 설계기간 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		토목설계과장	여용석		토목부장	전결 02/23 김영수
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-3396	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 (무교동) 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개