함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	2016년도 배급수관정비 사업 구간 변경 보고

1. 누수방지과-36호(2016.1.5.)호와 관련  2016년도 배급수관정비 사업계획에 대해 우리사업소에서 시행예정인 “창신동593-37~693-3번지외 4개소 배급수관 정비공사” 에 구간변경이 발생 아래와 같이 보고합니다.

연번	공사명	사업개요
		당초			변경			변경사유
		블록명	구경	연장	블록명	구경	연장
1	창신동 593-37 ～693-3번지 외 4개소 배급수관 정비공사	소 계	150 ～ 200	2,320	소 계	150 ～ 300	1,380
		대현산 71B/L	150	460	대현산 71B/L	150	220	일부구간 하수관 도로점용으로 굴착불가
		대현산 72B/L	200	450	대현산 72B/L	200	170	일부구간 굴착통제
		대현산 83B/L	150	220	대현산 83B/L	150	220	-
		북악유출가 1B/L	150	920	대현산 160B/L	300	500	확인굴착 DP확인
		대현산 74B/L	150	270	대현산 74B/L	150	270	-

가. 공 사 명 : 창신동593-37~693-3번지외 4개소 배급수관 정비공사

붙 임 : 1) 위 치 도 1부.

2) 확인굴착사진 1부.

3) 상 세 도 1부(별도발송).  끝

	중부수도사업소장
★주무관	이생기		시설관리팀장	代이훈재		시설관리과장	전결 02/23 이승철
협조자
시행	시설관리과-5382	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개