준공기한 연기 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김승완	함현준	02/23 박길영

	명에 의하여 『2015년 서강동외 7개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 2. 23.
보 고 자 : 직 지방시설주사 성명 : 김승완

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기 보고서(마포구 염리동 36-21)
내용	1. 공사위치 : 서울시 마포구 염리동 36-21 2. 작업지시번호 : 신설–214 3. 급수공사 종별 : 신설 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시하였으나, 수요가에서 신축공사 지연에 따른 공사기간 연기요청으로 공사기간내 급수공사가 불가한 실정임 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2016. 2. 28 ～ 2016. 2. 24 변경 공사기간 : 2016. 2. 28 ～ 2016. 3. 19 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.