문서번호	서울역일대종합발전기획단-1669
결재일자	2016.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사업계획팀장	재생사업반장
김상주		권완택	02/23 김길남
협조

- 서울역 7017 프로젝트 -

인포가든 Tree Pot 설치 검토회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역일대종합발전기획단

(재 생 사 업 반)

- 서울역 7017 프로젝트 -

인포가든 Tree Pot 설치 검토회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 2. 22(월) 10:00 ~ 10:30

○ 장    소 : 서울역일대종합발전기획단 사무실

○ 참 석 자 : 6명

- 서 울 시(3) : 재생사업반장, 사업계획팀장, 김상주 주무관

- 도 기 본(1) : 방재시설부 공원시설과 고소영 주무관

- 설 계 사(1) : 한국종합기술 이상헌 부장

- 제작업체(1) : ㈜ 한국테크월 조주형 이사

○ 회의내용

- 2016년 4월말 인포가든 개장에 따른 시급성 등 설치시기 논의

- 인포가든 트리팟 제작에 따른 소요일수 논의

- GFRC Tree Pot의 품질확인 방법 등 논의

□ 회의결과

○ 설치시기

- 인포가든 개장일이 2016년 4월말이므로, 일정 상 4.15.까지 현장에 Tree Pot 제작설치가 완료되어야 함

․ 몰딩(금형)제작은 7~10일 소요되며, 제작후 Tree Pot는 하루 1개 생산

○ GFRC Tree Pot의 품질확인

- 실험제작 : GFRC 제품의 품질을 확인하기 위해 시험제작 실시

- 갯    수 : Tree Pot 1개(직경 1.7m)

- 시    기 : 2016. 3.10.(목)까지

- 방    법 : 제작업체에서 실험제작하고 제시

○ 인포가든 Tree Pot 타입 조정 : 10개 타입 → 3개 타입

- 신속한 제작과 비용절감을 위해 Tree Pot은 3개 타입으로 조정하여 설치

○ 인포가든 Tree Pot 설치비용 지급

- 서울역 7017 프로젝트 설치공사 조경공사에 포함되어 있으므로 시공사 선정 후

도시기반시설본부 (방재시설부 공원시설과)에서 설치비용 지급

○ 향후 일정

- 트리팟 실험제작 : 2016.3.10.까지

- 트리팟 제작설치 : 2016.4.15.까지

- 인포가든 개장   : 2016. 4월말

□ 조치계획

○ 상기내용을 도시기반시설본부(공원시설과)에 통보하고 인포가든 시공 및 개장에 만전을 기하고자 함.   끝.