문서번호	조경과-930
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이영선	김효준	代강금완	심상원		전결 02/24 송천헌
협 조
	전략기획실장			代김명준

- 오감을 만족시키는 명품 장미 관람을 위한 -

장미원 품종 개선계획

2016.  2.

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 오감을 만족시키는 명품 장미 관람을 위한  -

장미원 품종 개선계획

수령 20년이 넘은 장미원의 장미를 화려한 꽃과 향기가 있으며 병해충에 강한

정원장미로 교체, 장미원의 품격을 높이고 시민서비스 향상을 도모코자 함

Ⅰ
		추진경위

장미원 운영개선을 위한 외부전문가 자문결과보고 (조경과-5684,‘15.10.28)

장미원 품종개량을 위한 출장결과보고 (조경과910-,‘16.02.23.)

Ⅱ
		현황 및 문제점

위    치 : 대공원 호수 주변

면    적 : 54,075㎡ (장미단지 4,000㎡)

개 원 일 : 2000. 9. 1.(유료시행일 2003. 5. 1.)

시설개요

○ 수목류 : 344종 50,800주

- 장  미 : 293종 34,700주 (대부분의 장미수령 20년 이상)

-  수목류 :  51종 16,100주

○ 시설물 : 분수대 3개소(중앙원형분수, 바닥분수, 벽천)

실개천 2개소, 연못 1개소, 시비 2개소, 파고라 2동,

정자 3동, 공원 등 180조, 기계실 50㎡, 투수콘크리트 3,700㎡

문 제 점

◦ 90%이상 절화장미고, 수령이 20년이 넘어 병해충에 약하고 꽃의 향기가 약함

◦ 품종을 백화점식으로 나열하여 스토리가 없으며, 관람객이 단지 밖에서만 관람할수 있음

Ⅲ
		추진내용

추진방향

기존 절화장미를 병해충에 강하고 꽃이 화려한 정원장미로 교체

장미화단 주변 회양목 식재로 경계 및 단지안 포토라인 조성

코코넛칩을 장미주변에 깔아 잡초 발생을 억제하고 미관향상

추진 세부내용

추진기간 : 2016. 2 ~ 3월

사업내용

◦ 장미 품종개량 예산범위 내에서 연차별 시행

(총 교체장미 10,000주 – 2016년 800주 교체 )

구 분	계	2016	2017	2018	2019	비 고
정원 장미	10,000주	800	3,000	3,000	3,200
사 업 비	352백만원	30	105	105	112

◦ 장미 경계 엣지 회양목 식재 (16,000주 – 2016년 1,500주)

◦ 코코넛 칩을 구매 장미하부 포설 (4,000㎡)

소요예산 : 38백만원 (장미구매 30, 회양목 5, 코코넛칩 3)

▶ 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 다양한축제 및 볼거리 프로그램운영,     장미원 유지관리, 시설비

추진일정

2. 25 ~ 3. 10 : 절화 장미 제거 및 기반 조성

3. 10 ~ 3. 30 : 수목, 코코넛칩 구매 및 식재

Ⅳ
		기대효과

장미원 경관 개선으로 시민고객 만족도 향상

공립수목원과 연계한 다양한 정원 장미 품종 확보

붙   임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 정원 장미 종류 1부.  끝.