투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	돈화문 국악예술당 건립 전기공사(총차,3차) 기간 연기 의뢰

우리 본부에서 추진 중인 ‘돈화문 국악예술당 건립 전기공사’ 공사 기간을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 전기공사
공사기간	총 차	2013.12.23.~2016.02.29.	2013.12.23.~2016.03.31.	31일 연장
	3차	2015.11.23.~2016.02.29.	2015.11.23.~2016.03.31.	31일 연장
계약금액		총차 금565,026,000원 3차 금365,026,000원		변경 없음
계 약 자		삼언전공㈜ 대 표 공석복

나. 변경사유 : 선행 공종 건축공종 지연에 따른 후속 공종인 전기공사 기간 연기

붙임  1. 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	02/24 권오식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-2704	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개