투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 기계설비공사)

1. 설비부-2579(2016.2.22.)호와 관련입니다.

2.『서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 기계설비공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기의뢰 현황

공 사 명	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수 기계설비공사	2015.12.16. ~ 2016.02.29.	2015.12.16. ~ 2016.04.27.	금액변경 없음

나. 귀책소재 및 연기사유

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

3). 연기사유 : 선행공종인 건축공사 지연에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	여인웅		설비부장	02/24 권오식
협조자
시행	설비부-2727	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	대시민공개