문서번호	설비부-2733
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	02/24 권오식
협 조

-서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)- 관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

도 시 기 반 시 설 본 부

(설 비 부)

「인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)」

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 선행 공정(건축) 지연으로 당초 납품기한을 다음과 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)

□ 공사위치 : 은평구 통일로 684 (녹번동 산1-61호 일대)

□ 공사규모 : 서울혁신파크 8동 리모델링(지하 1층, 지상4층)

□ 공사기간(2차) : 2016. 01. 20. ~ 2016. 04. 15(총차 : 2015. 11. 13. ∼ 2016. 04. 15.)

□ 공 사 비(2차): 금307,081,795원(총차-320,081,795원, 관급-130,842,950원 별도)

□ 시 공 사 : 광성피앤드씨(주) 대표 최종현

Ⅱ		관급자재 계약현황

(계약금액은 조달수수료 포함금액임)

품명	단위	수량	계약금액	계약일자	납품기한	계약자	비 고
전기히트펌프	식	1	108,856,060	′15.11.04	′16.02.29	삼성전자 주식회사	현장설치도
공기순환기	식	1	21,986,890	′15.11.04	′16.02.29	주식회사 에어패스	현장설치도

Ⅲ		납품기한 연기내용

□ 납품기한 연기사유 : 선행공정(건축 공사)인 천장 마감 지연에 따른  관급자재 설치

시기 미도래로 납품기한 연기가 필요한 실정임.

□ 납품기한 연기

납품요구번호	품명	납품기한		비 고
		당초	변경
12-15-2-52931-00	전기히트펌프	′16.02.29	′16.04.15	증)46일
12-15-2-53044-00	공기순환기	′16.02.29	′16.04.15	증)46일

□ 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미 부과

Ⅳ		조 치 계 획

□ 공사현장 건축공정(천장공사) 진행을 감안하여 당초 조달 구매한 관급자재의 납품기한을 기계설비공사 준공기한인 2016.04.15.일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 합의각서  1부.  끝.