부 장	02/24 권영찬		과 장	최광무	심사자	박종덕	설계자	안창호		설 계	심 사		결 재
										2016년2월 일	2016년2월 일
변 경 설 계 서(총괄 18회)
용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 2공구(총괄 18회)
구 분					당 초				변 경			증.감		비 고
총 용 역 비					3,888,470,000				3,895,280,000			증)6,810,000		물가변동 반영 및 건설사업관리기술자 투입계획 조정
도급비		공 급 가 액			3,243,572,727				3,234,863,636			감)8,709,091
		물 가 변 동			291,400,000				306,300,000			증)14,900,000
		소 계			3,534,972,727				3,541,163,636			증)6,190,909
		부 가 가 치 세			353,497,273				354,116,364			증)619,091
		계			3,888,470,000				3,895,280,000			증)6,810,000
< 용역개요 > ○ 총연장 : 3,233m [개착 1,977m, 터널 1,007m, 정거장 4개소 249m) ○ 감리기간 : 당초) 2009.01.07 ~ 2017.1.31(변경없음)