문서번호	방재시설부-2514
결재일자	2016.2.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공원시설과장	방재시설부장
임성은		김인숙	02/24 임춘근
협조
	주무관		박계현

「경의선숲길 공원조성공사」2차구간

볼라드 추가설치 수량변경에 대한 검토

2016. 02

도시기반시설본부

[방재시설부]

「경의선숲길 공원조성공사」2차구간

볼라드 추가설치 수량변경에 대한 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 2차구간 볼라드 추가설치 수량변경에 대한 실정보고에 대한 검토사항을 보고드림.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2016 – 52(2016.02.22)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 A=84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.5

○ 공 사 비 : 14,908백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 기존가옥 철거지연으로 인한 설계변경에 따른 볼라드 수량 변경

- 교통약자 통행을 위한 낮춤경계석 설치에 따른 차량진입방지용 볼라드 수량 변경

○ 주요변경내용 및 수량 검토

- 당초 설계 : 와우교구간 35개소, 신수동구간 30개소, 원효로구간 18개소

- 와우교구간은 기존가옥 철거지연에 따른 공원 선형 설계변경으로 차량진입 방지용        볼라드 추가

- 신수동구간은 배치간격 조정과 공원연결 보도 낮춤경계석 설치에 따른 차량방지용        볼라드 수량 추가

- 공원보수 및 비상차량 출입을 감안한 이동형 볼라드 추가

• 이면도로로 출입이 불가능한 와우교 및 원효동구간, 신수동 물길구간 진입부에           이동식 볼라드 설치

- 볼라드(D105×H800) 수량변경 내역(배치도면 붙임)

위 치	단위	당 초	변 경		증 ․ 감		비 고
			고정식	이동식	고정식	이동식
와우교구간	개소	**	**	*	*	*
신수동구간	개소	**	**	*	**	*
새창고개 잔여구간	개소	*	*	*	*	*
원효로 구간	개소	**	**	*	**	*
계		**	**	*	**	*

○ 관급자재비 증ㆍ감 현황                                   (단위 : 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
볼라드(고정식)	D105×H800	******	******	********	***** ********
볼라드(이동식)	D105×H800	*	******	********	**** ********
계		******	******	*********

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 상기와 같이 “경의선숲길 공원조성공사”의 볼라드 배치간격에 대해 법적기준과 공원이용객의  안전을 고려하여 검토한 결과, 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 제9조(보행안전 시설물의 구조 등) [별표2]에 의거 1.5m 기준으로 배치간격을 조정하고, 설계시  고려되지 않은 낮춤경계석 설치로 이용객 안전이 우려되는 구간의 방지용 볼라드를 추가하는 것이 적정하다고 사료되고,

○ 추후 공원관리를 감안하여 공원보수와 비상차량출입이 가능하도록 진입구간에   이동형 볼라드를 설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과 볼라드 추가설치 수량변경에 대하여 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하고 차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.