문서번호	설비부-2777
결재일자	2016.2.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		代배수웅	02/25 권오식
협조

「신사사거리~고양시계간 도로개설 전기공사」

관급자재 변경 검토 보고

2016. 2.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「신사사거리~고양시계간 도로개설 전기공사」

관급자재 변경 검토 보고

신사사거리~고양시계간 도로개설 전기공사」관련, 고양시방향 공사 중지에 따른 관급자재 수량 변경에 대한 검토 보고임.

사업개요

□ 사 업 명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설 전기공사(터널등기구 외 8종 구매)

□ 관급자재 납품기한

- 2015.07.08 ~ 2016.02.26

□ 계약금액

- 금58,240천원

□ 계약업체 : ㈜명도산업조명 /(주)코리아반도체조명

실정보고 내용

□ 관급자재 변경내용

[원]

품 목	계약자	계약금액		증·감
		당 초	변 경
가로등주 및 부속자재 외 1종	(주)명도산업	30,560,000	28,600,000	감1,960,000
도로조명설비 외 1종	㈜코리아반도체	27,680,000	25,780,000	감1,900,000
계		58,240,000	54,380,000	감3,860,000

□ 변경사유 : 고양시방향 도로공사 중지에 따른 수량 변경으로 금액변경

□ 납품기한 : 변경없음

조치의견

□ 신사사거리 공사 구간은 완료 되었으나 고양시방향 도로공사가 중지 되어 가로등 수량을 변경하고자 함.

□ 관급자재 수량변경 내용을 계약부서인 건설총괄부에 계약변경 의뢰코자 함.

붙임 : 합의서 2부. 끝.