문서번호	방재시설부-2554
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	02/25 임춘근
협조
	주무관		손병도

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」

월계동구간 지장물 소운반에 대한 실정보고 검토

2016. 02

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

월계동 구간 지장물 소운반에 대한 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 월계동 구간 지장물 소운반에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 방재시설부-2416(2016.02.23.)호

선진경춘(감)-16–087(2016.02.23)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 월계동구간 지장물  현황

- 월계동 구간 지장물(폐침목, 레일) 적재되어 있으며 한국철도공사에서 현재  매각 추진 중이나 구체적 매각기간이 불투명한 실정으로 기한내 공정 추진에 어려움이 예상되며,

- 지장물(폐침목, 레일)처리 관련 현장 합동회의 결과 반영,  원활한 공사추진을

위하여 원인자 이설 후 본공사 진행코자 함.

※ 지장물 처리 관련 현장회의 결과 (이노근 의원 비서관 주재)

▸ 도시기반시설본부 : 지장물 이설(폐침목, 레일)

▸ 한국철도공사 : 이설위치 지정 및 차후 이설 지장물 관리

- 목침목 및 레일 야적 전경

폐침목 야적 전경	레일 야적 전경

○ 수량 및 공사비 검토                                       (단위 : 천원)

구분	공종	단위	당초		변경		증·감		비고
			수량	공사비	수량	공사비	수량	공사비
10. 부대공
	폐침목 소운반	개	-	-	7,690	19,363	증)7,690	증)19,363
	레일 소운반	m	-	-	1,828	1,887	증)1,828	증)1,887
소 계						21,250		증)21,250
1) 직접공사비						21,250		증)21,250
2) 제경비						6,158		증)6,158
3) 도급액						27,408		증)27,408

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』 시행 중 상기와 같이 월계동 구간에 야적된 폐침목 및 레일 소운반에 대한 실정보고 검토 결과, 후속 공정인 조경, 전기, 통신공사 공정을 감안할 시 지장물 이설이 시급하며

현재 야적된 지장물은 한국철도공사와 협의하여 지정된 위치에 운반할 예정으로 상기와 같이 지장물 이설함이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과 지장물 이설(폐침목, 레일)에 따른 수량 및 공사비 산출 내역이 타당하다고 판단되어 승인 통보코자 하며, 차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.