함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	2015년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 계약해지 의뢰

1. 급수운영과 –4408(‘16. 2.25)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 있는『2015년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약상대자의 각종 압류등 사정으로 더 이상의 공사진행이 어려워 붙임과 같이 공사포기각서가 제출되어 계약해지를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

◦ 공 사 명 : 2015년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

◦ 계 약 자 : 바위산업개발(주) 장대석

◦ 계약금액 : 664,582,140원

◦ 공사기간 : 2015.05.04.~2016.05.31

나. 계약해지 사유 : 계약상대자의 각종 압류등으로 공사포기

다. 기성내역 : 41,250,000원(‘15.12.24)

라. 공사진행 사항 : 공정율 6.2%

마. 타절준공 정산 : 기성금 수령후 더 이상 공사진행 사항이 없어 추가지급 없음

따로붙임 1. 계약해지 및 타절준공 검토 보고 1부.

2. 공사포기각서 1부.

3. 계약해지 관련공문 1부.

4. 기성검사 조서 및 기성내역 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김찬오		급수설비팀장	代최성태		급수운영과장	전결 02/25 오기석
협조자
시행	급수운영과-4425	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-772-7211	/전송	02)3146-2789	/	kco0178@seoul.go.kr	/	대시민공개