문서번호	기전과-1522
결재일자	2016.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	박심근	02/26 이종엽
협 조
	주무관		이명호
	주무관		황준석

2016년 교통안전표지 유지보수공사 시행계획

(연간단가)

2016. 2

성동도로사업소

(기 전 과)

2016년 교통안전표지 유지보수 공사 시행계획(연간단가)

교통안전표지의 유지관리 및 서울지방경찰청 규제사항 처리를 위해

2016년 교통안전표지 공사(연간단가)를 시행하고자 함.

Ⅰ

시설물 현황

구 별	신 호 기					안전표지(매)
	계	신호등(조)	제어기(대)	음향신호기(대)	보행자 보조장치(대)
계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055
성 동 구	2,196	1,595	114	194	293	2,939
광 진 구	2,092	1,409	104	188	391	3,738
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321
중 랑 구	2,964	2,200	148	279	337	3,057

Ⅱ

예산 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	전년예산	배정예산	증·감	예산과목
교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	******	******	*******	교통안전표지 설치 및 유지보수(시설비)

Ⅲ

추진 및 집행계획

▣ 추진계획

○ 교통운영과-1242(2016.1.21) : 교통안전표지 설치 및 개선 예산재배정

○ 동부도로사업소 기전과-1691(2016.2.16)

- 2016년 교통안전표지 공통일위대가 배부

○ 2016.2.25 ~ 2.29 : 공사 발주 의뢰(관리단속과)

○ 2016.3 : 공사 착공

▣ 집행계획

○ 예산집행 계획                                          (단위 : 천원)

예산과목	공사명	소요예산	비고
교통안전표지 설치 및 유지보수	2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)	******	도급비 - 규제 신설 및 유지보수
	관급자재 구매 및 이전비 등 기타 -교통안전 표지판, 굴착복구비 등	******	분기별 집행 - 작업지시에 따라 금액변경 있음
소 계		******

▣ 발주방법

○ 교통안전표지 분야 1건

- 계 약 방 법  : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의거 금속구조물·창호공사업 전문면허 보유 업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅳ

향후 추진 계획

○ 도시교통본부(교통운영과, 보행자전거과등)에서 수시로 배정하는 다음사업에 대하여 적기에 발주하여 추진하고자 합니다

- 교통축 개선사업

- 도로교통 소통 개선사업

- 교통사고 잦은곳 개선사업

- 횡단보도 확충 및 정비사업

- 장애물 없는 대중교통 이용환경 개선사업

붙    임 : 1. 교통안전표지 설치 및 개선 예산 재배정 각1부.

2. 교통안전표지 설치 및 개선 공사 공통대가 배부 각1부. 끝.