투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	부진공정 만회대책 제출 기간 연장 통보 및 공사계약사항 이행 조치 요청

1. 동원(재사용) 제2016-47호(2016.2.25.) 및 서울시 도기본 건축부-2085(2016. 2.19)호, 건축부-14369(2015.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리시와 공사계약 체결하여 재사용플라자 건립공사에 대하여 귀 사에 부진공정 만회대책 제출 및 공사계약사항 이행 촉구 통보와 관련하여 2016. 2. 24(수) 10:00 시공사 대표회의시 공정 만회대책 수립을 위한 충분한 검토를 위해 2016. 3. 2(수)한 제출 기간연장 요청사항에 대해 기간연장되었음을 알려드립니다.

3. 귀 사에서 연장 기한내 우리시 및 건설사업관리단에 부진공정 만회대책(인력·장비·자재의 월별 상세투입계획, 우기를 반영한 공정계획, 안전관리등 포함)을 제출하시고  공사계약서, 관련법 등에 따라 2차계약 준공(2016. 6.30) 이행에 차질이 없도록 하여 관련규정에 따라 불이익 행정처분을 받지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시 서초구 마방로 68 동원건설산업빌딩 6층 동원건설산업(주) 대표이사 김 영 현 귀하,서울시 송파구 백제고분로17길54(잠실로 선영빌딩 2층) (주)서우건영 대표이사 김 기 수 귀하
주무관	김찬유		환경시설과장	신명승		건축부장	02/26 안재혁
협조자
시행	건축부-2422	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)