투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	920공구 건설공사 전면책임감리용역 변경 계약의뢰(총괄 6회, 6차 2회)

우리본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역

2. 계 약 자 : 벽산엔지니어링㈜ 대표 함영승 외 3개사

3. 계약금액 : 총괄 4,767,919천원(6차 1,121,400천원)

4. 용역기간 변경

구 분	계약금액			용역기간			비 고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
총괄(6회)	4,767,919	4,767,919	-	‘09.11.18∼’16.02.28	‘09.11.18∼’17.02.28	(증)366일
6차(2회)	1,121,400	1,121,400	-	‘15.01.31∼’16.02.28	‘15.01.31∼’16.07.13	(증)4.4개월

5. 연기사유 : 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사의 준공기한 연기에 따른 감리용역기간 연장 및 감리 투입계획 조정

6. 예산과목

- 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 일반회계 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장 안전관리 대책추진, 감리비

붙 임  1. 준공기한 연기 및 감리원 투입계획 변경 검토보고 1부.

2. 변경 설계서 2부(총괄 6회, 6차 2회).

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	02/26 김진팔
협조자	주무관	한재호		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-2343	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개