문서번호	급수운영과-3314
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
이덕규	김용현	전명수	02/26 代장성만
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

송배수관 정비공사 시행에 따른 교통소통대책 수립용역 추진계획

강동수도사업소

송배수관 정비공사 시행에 따른

교통소통대책 수립용역 추진계획

2016년도 송배수관 정비공사 시행건에 대하여 교통소통대책 수립용역을 추진하여 도로 점용 공사로 인한 시민불편을 최소화 하고자 함

□ 개요

○ 용 역 명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

○ 용역대상 개요

공 사 명	공사개요(교통소통대책 구간)		도로명	비 고
	구경(㎜)	연장(m)
거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사	7,00	1,100	거마로, 양산로

○ 용 역 비 : 18,675,000원

○ 용역기간 : 착공일로부터 60일간

○ 용역개요 : 상수도관 매설을 위한 이동식 도로점용 1,100m

□ 추진계획

○ 용역추진계획 방침 → 기술용역 타당성 심사요청(기술심사담당관) → 용역발주 → 계약 → 교통소통대책심의회 심의 → 승인통보 → 공사착공

□ 용역내용

○ 용역목적 : 공사중 교통대책의 질적 향상을 도모하고, 도로점용 공사로 인한                  시민불편 최소화

○ 추진근거 : 송파구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조 2항 적용대상

○ 과업범위 : 거마로(650m), 양산로(450m) 상수도관 매설을 위한 이동식 도로 점용

○ 주요과업내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 교통현황 및 분석

- 교통처리 계획도 작성

- 사업지 주변 교통시설 설치계획

- 교통소통대책 관련기관의 심의 또는 자문 자료 작성

○ 용역대가 산출근거

- 실비정액가산방식 : 교통관련계획 표준품셈(한국교통기술사협회 2015년)에   의해 산출된 투입인원에 대하여 적정 인원으로 투입비율 조정

□ 추진 일정

○ 교통용역 타당성 심사 및 교통용역 발주 ---- 2015. 3월

○ 용역착수 ------------------------------------ 2015. 3월

○ 교통소통대책 심의통과----------------------- 2015. 4월

○ 용역 준공 ----------------------------------- 2015. 5월

□ 행정 사항

○ 기술심사담당관에 교통소통대책 수립용역 타당성 심사 요청하여 그 결과에

따라 용역 발주하고자 합니다.

- 용 역 비 : 18,675,000원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후송배수관 정비)

붙임 : 1) 기술용역(교통) 타당성 심사요청서 1부.

2) 과업지시서 1부.

3) 설계내역서 1부.  끝.