문서번호	동남권공공개발추진단-1857
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	공간계획팀장	동남권조성반장	동남권공공개발추진단장
이은중	김형건	김용학	02/26 최경주
협 조

코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 수립 용역 기한 연기 보고

2016. 2.

도 시 재 생 본 부

(동남권공공개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 수립 용역 준공기한 연기 보고

현재 추진중인 「코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 수립 용역」의 준공기한 연기에 관하여 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 수립 용역

○ 용역기간 : ’14.7.7. ~ ’16.2.29.

○ 용역기관 : ㈜건화, ㈜해안종합건축사사무소, ㈜ANU디자인그룹건축사사무소

○ 용 역 비 : 463,000천원

○ 과업내용

-「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제49조에 따른 “코엑스~잠실운동장 일대 지구단위계획 재정비” 수립 등 수행

□ 추진경위 (현재 공정률 약 80%)

○ ’14.7.7.   : 용역 착수

○ ’15.1.~3. : 지구단위계획 수립 절차 주관부서(도시관리과) 정기 협의

○ ’15.5.21.  : 지구단위계획구역 및 서울의료원 특별계획구역 결정(변경) 고시

○ ’15.7.~ 8. : 국제교류복합지구 조성 관련 설문조사

○ ’15.10.     : 지구단위계획 재정비(안) 보고 (관련 부서장)

- 행정2부시장, 도시재생본부장, 도시계획국장, 도시관리과장

○ 15.9..~1.  : 국제교류복합지구 교통 TF 구성․운영 (5회차 진행)

□ 용역 연기사유 (귀책사유 서울시)

○ 교통개선대책 마련을 위한 관련부서 TF회의 진행중으로 지구단위계획 수립시 포함되어야 하는 “교통성 검토서” 작성 어려움

○ 관련 도서 작성 후 행정절차 이행을 위하여 준공기한 연기 필요

□ 용역 연기내용

○ 용 역 비 : 463,000천원 (변경없음)

○ 용역기간 : ’16. 2.29.(당초) → ’16. 8.31.(변경)

○ 지체상금 : 미부과

□ 향후일정

○ `16. 2.29.   : 용역계약 변경 체결

○ `16. 3.~6.  : 지구단위계획 입안 및 심의, 결정 고시

○ `16. 8.      : 보고서 작성/납품 및 용역 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 예정 공정표 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

< 붙임 1 > 준공기한 연기 의뢰서

< 붙임 2 > 예정 공정표

○ 과 업 명 : 코엑스∼잠실운동장일대 도시관리계획 수립

○ 당 초 과업기간 : 2014. 07. 07 ～ 2016. 02. 29 (20개월)

○ 변 경 과업기간 : 2014. 07. 07 ～ 2016. 08. 31 (26개월)

공 종		과 업 수 행 공 정(15개월)
		2014년						2015년												2016년
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
1. 운동장 일대 마스터플랜수립	1) 현황조사 여건분석
	2) 부문별 기본구상
	3) 성과품 작성 (대외발표)
2. 지구단위계획 재정비	1) 현황조사 및 부문별 계획
	2) 전문가 자문 및 세부계획수립
	3) 사전자문 및 입안 (의견청취)
	4) 도시건축공동위원회심의
	5) 결정고시 및 성과품 작성

< 붙임 3 > 합의각서