문서번호	급수운영과-1721
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
유명수		이경로	01/27 김광식
협조
	주무관		代제영도

기성부분 정산(4차) 보고

「2013년 강남 서초구 관내 포장도로굴착복구공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

기성부분 정산(4차) 보고

우리사업소에서 시행하는 「2013년 강남,서초구 관내 포장도로굴착복구공사」 계약상대자인 용인토건 대표 김영란으로부터 기성부분 정산(4차) 요청서가 제출되어 아래와 같이 기성부분 정산 보고함

※관련문서 : 용인토건 정산요청서(접수번호 : 1482호, ‘14. 1. 23)

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2013년 강남 서초구 관내 포장도로굴착복구공사

❍ 공사개요 : 아스콘포장 210.62a, 보도블록포장 7.61a

❍ 계약기간 : 2013. 5. 2 ~ 2014. 4. 30

❍ 계약금액 : 927,021,480원

❍ 계 약 자 : 용인토건  대표  김영란

❍ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,급수공사비,신설공사비외 4

❍ 감리자 현황

- 공사책임감리 : 서울특별시 시설관리공단

ㆍ송배수관, 세척갱생관, 시설물 공사 등

- 시공감리 : (주)이준엔지니어링

ㆍ급수공사, 긴급누수복구공사 등

□ 기성내역

❍ 정산차수 : 4차 정산

❍ 정산기간 : 2013. 6. 1 ~ 2013. 12. 25

❍ 정산개요 : 아스팔트포장 26.56a, 보도블록포장 3.96a

❍ 금회 정산 금액 : 249,403,000원

❍ 공사비(계약금액) 집행현황

(단위 : 원)

계약금액	집행금액			잔액
	누계	전회	금회(4차)
927,021,480	867,306,000	273,713,000	249,403,000	59,715,480

❍ 정산 내역(공사건 및 예산과목별)

(단위 : 원)

공사명	예산과목	계	면적(a)		감리자
			asp	보도	공단	이준엔지니어링
계		249,403,00	26.56	3.96	-	1건
소계	〈이준엔지니어링 감독분〉	249,403,00	26.56	3.96		1건
강남,서초구 관내 긴급누수복구공사	상수도사업비용, 영업비용 배급수비,수선유지교체비, 기타교체비(상수도관누수복구)	249,403,000	26.56	3.96		●

□ 조치의견

❍ 「2013년 강남 서초구 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)」 계약상대자인 용인토건 대표 김영란으로부터 기성부분 정산요청서가 제출됨에 따라 붙임 설계도서에 의거 상기와 같이 기성부분(4차) 정산 시행코자 함.

붙임 : 정산(4차) 내역서. 끝.